투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(외부출입구 #1 구간 돌출 기초콘크리트 깨기 관련 실정보고 건 승인)

1.업무지시현장 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 한신공영(주), 하남선(5호선연장)

1-1공구 건설공사 주식회사 신성엔지니어링, 하남선(5호선연장) 1-1공구

건설공사 주식회사 동일기술공사, 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사

주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-04-09 10:04:17

3.지 시 내 용

1) 하남 제19-153호(2019.3.28.)와 관련입니다.

2) 우리부에서 시행중인 『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』의 외부출입구 #1 구간 돌출 기초콘크리트 깨기 관련 건설사업관리단의 실정보고 건에 대하여 보고내용과 같이 승인하오니 설계변경시 정산 반영하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							조규양			토목1과장					04/09 윤방식
협조자
시행			도시철도토목부-3709									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 서울시도시기반시설본부 도시철도토목부															/
전화		02-772-7243						/전송			02-772-7306					/	jgyygj@seoul.go.kr												/	대시민공개