투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 자문회의(소위원회 제2차) 조치결과 보고

2019년 제2차 설계변경자문회의에서 조건부 가결된 『노들섬 특화공간 조성 토목공사』의 지적사항에 대하여 아래와 같이 조치코자 합니다.

지 적 사 항	조치결과	자문금액(원)	절감액(원)	증감사유
지반보강 그라우팅 설계변경 대가 적용 검토	우리시 지하철공사 적산기준에서 우리시 서울형 표준품셈 적용	264,484,000	111,452,000	표준품셈 적용에 따른 대가 변경
교각 공법 변경에 따른 자재비 단가 검토	자재단가 변경	598,356,000	1,474,000	조달단가 적용

붙 임 : 조치결과 1부.  끝.

주무관	박상철		도시고속도로과장	명경출		토목부장	04/10 김영수
협조자	주무관	김종혁
시행	토목부-6037	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	대시민공개