현장조사결과 보고서***********

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-7335		강철운	이준호	04/10 김홍준

명에 의거 은평구 관내 노후관 정비공사를 위해 확인굴착 결과 및 조치의견을 아래와 같이 보고합니다.

☞  아     래 ☜

□ 작업지시 : 관망개선-10(19.04.01 ~ 04.12)

□ 보고위치 : *************

□ 관련근거 : 이준1811-87(2018.11.19.) 및 시설관리과-4183(19.03.04)

□ 횡단굴착 결과

응암동 600-6번지 앞	응암동 600-10번지 앞

※ 횡단굴착 결과 GIS표기상 D50㎜(SSP)는 D40㎜로 확인 되었으며 그 외 유관기관 지하 매설물(하수관 D600, 통신관 D40)이 매설되어 있어 공간이 협소함.

□ 보고자의견

○ 당초 노후관 정비계획 시 D=80㎜, L=18m 와 연장구간 D=40㎜, L=40m을 주변관로 현황과 구경차이를 고려하여 D200㎜, L=50m로 정비할 계획이였으나 유관기관의 지하매설물(하수관D600, 통신D40) 등에 의해 공간이 협소하여 계획변경이 필요하다고 판단됨.

********

	관로정비 및 확대설치 필요구간

※ 당초계획:D=80㎜,D=40㎜ → D200㎜

※ 변경계획:D=80㎜,D=40㎜ → D100㎜

L=50m

□ 조치계획

○ 확인굴착 결과 상기 주소지 주변 지하매설물의 저촉으로 공간이 협소하여 당초 계획에서 배급수관의 구경을 고려하여 D=80㎜, D=40㎜ 구간을 D=100㎜(L=50m)로 배수관망 정비코자 함.

○ ‘2018년 은평구관내 상수도공사’ 계약업체인 창익건설*****로 하여금 정비토록 작업지시하고

○ 위와 같이 지시한 공사에 대하여 현재 위탁 감리중인 “(주)이준엔지니어링”에 감독토록 조치하여 시공 및 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : D=100㎜,  L=50m

- 소요예산 : 약 10,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(배급수관 정비)

붙  임 : 1. 현장실정보고서 1부.

2. 작업완료보고서 1부.  끝.

부분공개(6)