문서번호	시설보수과-2089
결재일자	2019.4.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이생기		윤승범	04/10 이성재
협조
	주무관		이석근

청계천 좌안 차집관로

정밀안전진단 용역 실정보고

2019. 04.

중랑물재생센터

(시설보수과)

청계천 좌안 차집관로 정밀안전진단 용역 실정보고

우리 센터에서 추진하고 있는 『청계천 좌안 차집관로 정밀안전진단용역(2차)』 시행에 따른 현장실정에 대하여 아래와 같이 보고함.

1		용역개요

□ 용 역 명 : 청계천 좌안 차집관로 정밀안전진단 용역(2차)

□ 위    치 : 청계천 좌안(신답 빗물펌프장~제2마장교)

□ ****************

□ 용역기간 : ‘19.01.28 ~ ’19.07.31

□ ****************

□ 용역내용 : 하수암거(A)  2.8m×2.8m, L=600m

2		실정보고

□ 청계천 차집관로(A.B) 2련의 차집관로가 설치 운영되고 있고 현재 차집관로(A)     구간은 정밀안전진단 중에 있음.

□ 청계천 좌안 차집관로 성능개선공사(B련 정릉천 합류부~신답빗물펌프장) 시행중      하류구간(B련 신답빗물펌프장~제2마장교) 하수 흐름 차단으로 물막이 공사가      불필요하여 발주를 취소한 상태임(별첨:시설보수과-2064호(‘19.4.9))

3		조치의견

□ 청계천 좌안 차집관로 물막이 공사 발주취소에 따라 별도 용역발주를 취소하고,     공사중 하수흐름 차단으로 시급성을 감안 기존 계약된 차집관로 A련 용역중인 대신

이엔지(주) 대표 하상우에게 하여금 긴급 추가 과업지시 하여 신속한 정밀안전 진단을     시행코자 함.

□ 추가(하수암거(B) 2.5m×2.5m, L600m) 과업지시로 발생된 증액에 대해서는        기심의 심사결과 금액을 감안하여 도급자와 협의하여 진단업무 수행에 만전을       기 하고자 함.

- 청계천 좌안 차집관로 정밀안전진단 용역(2-2차) 기술심사 용역심사 결과통보

(기술심사담당관-3278(2019.2.15)

********************

- 추가과업지시 : 하수암거(B련)  2.5m×2.5m, L=600m

4		향후 계획

□ 2019.04.10 : 용역사 회의

□ 2019.04.10 : 추가과업지시

□ 2019.07.31 : 용역준공

붙임 : 1. 물막이 공사 취소보고서 1부.

2. 청계천 차집관로 현황 1부.    끝.