문서번호	교량안전과-6505
결재일자	2019.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장		안전총괄관
이우근	박찬규	代박동욱		04/11 하종현
협 조

"강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발 용역"

계약기간 연장 검토 보고

2019. 04

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

계약기간 연장 검토 보고

"강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발 용역"

「강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발 용역」추진 중 「서울인프라 다음 100년 프로젝트」와의 연계시행에 따른 용역 계약기간을 연장하고자 함.

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발 용역

□ 용역기간 : 2018.6.25. ~ 2019.4.20.

□ 용 역 사 : 유니콘스(주), 한국종합기술(주), ㈜지쓰리웨이

□ 계약금액 : 256,500천원

※「서울인프라 다음서울 100년 프로젝트」의 통합기준 매뉴얼 및 실태평가 보고서와 연계

통합기준 매뉴얼(`17.8~`18.8) (안전총괄과)		실태평가 보고서(`18~`19) (도로시설과 등 13개 부서)		종합관리계획(`19~`20) (안전총괄과)
‣ 중장기 관리계획 수립 시 과학적 근거의 작성기준		‣ 시설물 수명향상 및 경제적 효과를 고려한 중장기 관리 계획 수립		‣ 서울시 주요기반시설 대상 종합적 투자계획 마련

□ 추진 경과

○ 2018. 6.25   : 과업수행 착수

○ 2018. 7.12   : 착수보고 및 자문회의

○ 2018. 9.4     : 외부자문회의

○ 2019. 4.4     : 과업추진사항 보고(안전총괄관)

Ⅱ		용역 계약기간 연장

□ 연장사유

○「서울인프라 다음 100년 프로젝트」의 일환으로 도로시설과에서   추진중인 「도로시설물 유지관리이력 정보 구축 및 실태평가 용역」과    연계시행에 따른 용역 기간 연장 필요

- 본 과업은 서울시 관리 강교 95개 시설물에 대한 도장상태 평가 및 재도장 시기 판단기준 마련 등을 위한 용역으로서

- 본 용역과 연계 시행중인 「도로시설물 유지관리이력 정보 구축 및 실태평가 용역」추진이 늦어져(당초 ‘18.03~’19.2⇒변경 ‘18.11~’19.10,  도로시설과) 이와 병행하여 시행중인 본 용역의 충실한 과업수행을 위해 계약기간 연장 필요

□ 기간 연장내용 : 7개월(210일) 연장

○ 당 초 : 2018.06.25. ~ 2019.4.20.

○ 변 경 : 2018.06.25. ~ 2019.11.16.

□ 귀책소재 : 서울시

□ 지체상금 부과 여부 : 부과하지 않음

Ⅲ		향후 계획

□ 2019.  4월 : 계약기간 연장에 따른 재계약 의뢰(재무과)

□ 2019.  7월 : 중간보고 및 외부전문가 자문회의 실시

□ 2019. 10월 : 최종보고 및 외부전문가 자문회의 실시

□ 2019. 11월 : 용역 준공

붙 임 : 계약기간 연장 내용 1부. 끝.

붙임		계약기간 연장 내용

○ 용 역 명 : 강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발 용역

과업내용	연장 내용		소요 기간
1. 도장 상태에 대한 과학적이고 정량적인 평가방법 및 재도장 시기 판단 기준 마련
· 서울시 관리 강교의 도장 현황 조사(95개) · 도장평가방법 문제점 및 개선방안 도출 · 정량적 열화도 평가 방법 및 재도장 시기 판단 기준 마련	○ 실태평가 용역(도로시설과)을 활용한 95개소의 상세 제원 및 과거이력 수집/검증 ○ 95개 도장성능 평가 결과 및 재도장시기 분석 결과를 실태평가 보고서 작성(도로시설과) 및 종합 관리계획(안전총괄과) 수립에 제공		6개월
2. 장수명화를 위한 도장사양 및 최신 도장 적용 방안 마련
· 최신도료에 대한 도장품질 검증 · 장수명화 도장사양 적용 분석/평가 방안 → LCC분석 방법 제시	○ 실태평가 용역을 통해 제공(도로시설과)된 점검·진단, 보수·보강 이력 데이터 활용하여 서울시에 맞는 도장 열화모델 개발
3. 강교 도장의 선제적 유지관리를 위한 도막진단시스템 개발			1개월
· 도막진단 프로그램 개발 → GUI 및 WEB기반 프로그램 개발 · 시스템 운영 인프라 도입 → 사용성 검토 및 매뉴얼 작성	○ 실태평가에서 정보 조사한 DB를 95개교 도막진단프로그램에 정보 입력
4. 상기 내용을 반영한 “강교 도장 유지관리 지침” 수립・시행
· 강교 도장 유지관리 지침 작성	○ 실 데이터를 통해 도출된 평가/분석 결과를 바탕으로 유지관리 지침 작성