문서번호	방재시설부-5203
결재일자	2019.4.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송민섭		조성만	04/12 이임섭
협 조

[반포천 유역 분리터널 건설공사]

수직구 암선변경에 따른 가시설 및 갱문변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

도시기반시설본부

(방재시설부)

[반포천 유역 분리터널 건설공사]

수직구 암선변경에 따른 가시설 및 갱문변경 검토 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

현재 진행 중인 「반포천 유역 분리터널 건설공사」 와 관련하여 연암선이 기 설계내용보다 하향함에 따라 이에 따른 가시설 및 갱문변경 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 반포사관 제2019-145호(2019. 4. 4.)

- 수직구 암선변경에 따른 가시설 및 갱문변경관련 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 반포천 유역 분리터널 건설공사

○ 공사위치 : 서초구 법원로10 ~ 서초구 사평대로 240 일원

○ 공사규모 : 유역 분리터널(▣4.5m×4.5m ~ D6.5m, 연장1,162m)

○ 공사기간 : 2018. 2. 1. ~ 2021. 1. 30.

○ 도 급 비 : 337억원

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

○ 시 공 사 : ㈜호반산업 외 1개사

Ⅲ		보고 내용

○ 현황 및 조치사항

- 연암선 현황 : 시점부 수직구 가시설 지보공 설치를 위하여 확인굴착결과 연암선이 당초 설계내용보다 –3.2m 하향형성

- 조치사항 : 수직구 가시설(록볼트+숏크리트 → 어스앙카+토류벽) 및 NATM터널 갱문 강관다단보강그라우팅(1열 →2열) 공법변경

○ 변경사항

- 수직구 지반현황

(H:두께)

구분	당 초	변 경	비 고
토 사	H=6.4 ~ 6.7m	H=0.8 ~ 2.9m
풍화암	H=1.0 ~ 2.3m	H=9.2m
연 암	H=11.0 ~ 12.6m	H=7.9 ~ 10.0m	전체 H=20.0m

- 수직구 가시설 변경

구분	지반현황
당초

구분	지반현황
변경

- NATM구간 변경

구분	당 초	변 경
N A T M 구 간

○ 개략 주요공종 수량 증·감 현황

구 분	규격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
강관다단그라우팅(소구경)	연암,L=12m	공	154	182	28
어스앵커공	토사,풍화암,연암	공	65	103	38
락볼트		EA	412	376	-36

※ 공사비는 암매각 등과 함께 추후 정산

○ 설계자 및 기술지원기술자 검토

[설계사 : 제일엔지니어링]

- 연암선 하향에 따른 흙막이 지보공 변경

· 현장감독관협의 후 풍화암구간에 “어스앙카+토류벽” 공법 변경 가능

- 갱문 및 NATM구간 상부 암성상 변경에 따른 보강공 변경

· 현장감독관협의 후 강관보강 그라우팅 2열보강으로 변경 가능

[토질 및 기초 기술지원기술자 : ㈜이산 정용규]

- 수직구 가시설계획 변경 및 터널 시점부 강관다단 그라우팅 변경에 대하여 안정성 확보에 문제가 없음

- 2열 강관다단 그라우팅의 경우 수평시공보다는 5°내외로 상향 시공하는 것이 안전할 것으로 판단됨

○ 책임건설사업관리기술자 의견

- 검토결과 수직구 가시설계획 변경 및 강관다단 그라우팅 변경계획은 안정성 확보에 문제가 없을것으로 사료되며,

- 시급한 공정추진을 감안, 우선 시공할 수 있도록 승인하여주시고 추후 암판정 결과에 따라 정산보고할 예정임.

Ⅲ		보고자 의견

○ 실정보고 검토결과 수직구 가시설계획 및 터널 시점부 강관다단 그라우팅 변경은 적정하다고 판단되는 바, 이를 승인처리하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.