투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전 (고덕차량기지내 유치선, 시운전선, 신·입출고선에 대한 실정보고 회시)

1.업무지시현장 : 하남선(5호선연장) 궤도공사(2공구)[장기1차] 주식회사 신승엔지니어링, 하남선(5호선연장) 궤도공사(2공구)[장기1차] 화성궤도(주)

2. 작 성 일 자 : 2019-04-12 15:04:47

3. 지 시 내 용

가. 관련근거

1) 하남궤2-19-162호(2019.03.29.) 고덕차량기지 차량정지표지 및 승무원 승차대 설치관련 실정보고

2) 하남궤2-19-159호(2019.03.28.) 고덕차량기지 건널목 시공관련 실정보고

나. 고덕차량기지내 유치선부설 완료 후 열차 유치를 위하여 차량정지표지 및 승차대 설치하여 전동차 방호에 철저를 기하고, 시운전선 및 신입·출고선에 설치되는 건널목을 서울교통공사 의견을 반영하여 책임건설사업관리기술자  의견과 같이 우선 시공하고, 변경된 증·감 내역은 추후 설계변경시 정산   반영하여 주시기 바랍니다.

○ 변경사항

1) 차량정지표지 : 2개 추가

2) 승무원 승차대 : 1개 추가

3) 건널목 수량 변경 : 당초 1개소 ⇒ 변경 2개소

4) 건널목 종류 변경 : 당초 목보판 건널목 ⇒ 고무판 건널목.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							최경호			궤도과장					04/12 代정중규
협조자				주무관						김근수
시행			도시철도토목부-3903									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 9층															/
전화		772-7243						/전송			772-7306					/	ckh4815@seoul.go.kr												/	대시민공개