투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울교통공사사장
(경유)	궤도처장
제목	하남선(5호선 연장) 상일역 궤도 연결공사 시행 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도시철도토목부-3769호(2019.04.09.)와 관련한 내용입니다.

3. 우리 본부에서 시행 중인『하남선(5호선연장) 궤도공사(2공구)』의 상일역 종점부 기존 5호선과 신설선 구간의 궤도 연결을 위한 회의 결과를 반영하여 시행 계획을 송부  하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요 : 5호선 기존선과 신설 구간의 궤도 연결(시점부)

나. 공사시행 계획

1) 신설선 하선작업(주간작업)

가) 작업일시 : 2019.04.15.(월) ~ 2019.04.30.(화) 08:00 ~ 17:00

나) 작업내용 : 궤광조립, 뒷정리

2) 신설선 상선작업(야간작업)

가) 작업일시 : 2019.04.15.(월) ~ 2019.04.30.(화) 01:00 ~ 04:30

나) 작업내용 : 궤광조립, 뒷정리

3) 콘크리트타설작업(주간작업)

가) 작업일시 : 2019.04.25.(목) 08:00 ~ 14:00

나) 안전대책

- 안전관리자 배치(철도운행안전관리자 2명, 열차감시원 1명)

- 운행선과 신설선 사이 안전휀스 설치

다) 비산먼지 방지대책 : 물청소 철저 및 집진기 설치 등

다. 협조 요청사항

- 2019.04.25.(목) 08:00 ~ 14:00 : 안전조치 이후 작업 시행함을 전동차 승무원 통보

붙임 : 1. 시점부 기존선 연결 시공계획서 각 1부.

2. 시점부 기존선 연결 상세 일정 1부.  끝

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최경호		궤도과장	代정중규		도시철도토목부장	04/12 정대현
협조자	주무관	김근수
시행	도시철도토목부-3844	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 9층	/
전화	772-7243	/전송	772-7306	/	ckh4815@seoul.go.kr	/	대시민공개