“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약기간 연장 의뢰(강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발 용역)

1. 교량안전과- 6505호(2019.04.11)와 관련입니다

2. 현재 우시시에서 시행중인 「강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발 용역」과 관련하여 도로시설과 용역과 연계추진에 따른 용역 계약기간을 아래와 같이 연장하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 당초 계약내용

- 사 업 명 : 강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발 용역

- 계약기간 : 2018.06.25.~2019.04.20

- 계약금액 : 금256,500,000원(금이억오천육백오십만원정)

- 업 체 명 : 유니콘스(주), ㈜한국종합기술, ㈜지쓰리웨이

나. 변경 계약내용 : 7개월(210일) 연장

- 당 초 : 2018.06.25.~2019.04.20

- 변 경 : 2018.06.25.~2019.11.16

- 연장사유 :「서울인프라 다음 100년 프로젝트」의 일환으로 도로시설과에서 추진 중인 「도로시설물 유지관리이력 정보 구축 및 실태평가 용역」과 연계 시행에 따른 용역 기간 연장 필요

- 귀책소재 : 서울시

- 지체상금 부과여부 : 부과하지 않음

붙 임 1. 계약기간 연장 검토 보고서 1부.

2. 계약기간 연장 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	이우근		강구조교량팀장	박찬규		교량안전과장	04/12 代박동욱
협조자
시행	교량안전과-6595	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서울특별시 서소문별관 1동 2층	/
전화	2133-1961	/전송	2133-1429	/	cjsrp52@seoul.go.kr	/	부분공개(5)