문서번호	공공재생과-3909
결재일자	2019.4.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		특화공간조성팀장	공공재생과장
박영우		신명승	04/12 이동일
협조	주무관		김지호
	주무관		윤지선

백년다리(한강대교 보행교) 사업 타당성 용역 관련

계약변경 검토 보고

2019. 4

도시재생실

(공공재생과)

백년다리(한강대교 보행교) 사업 타당성 용역 관련

계약변경 검토 보고

백년다리(한강대교 보행교) 사업 관련하여 기 계약한 타당성용역의 용역명이 변경됨에 따라 계약변경 사항을 검토하고 보고함

용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 노들섬 한강대교 백년다리 타당성 용역

❍ 용역기간 : 2019. 3. 25. ~ 2019. 7. 24. (계약일로부터 4개월)

❍ 계약금액 : 금52,200,000원

❍ 계약업체 : 주식회사 도시경영연구원(대표 : 권선애)

계약변경 검토

❍ 변경내용

구 분	변 경 내 역		비 고
	당 초	변 경
용 역 명	노들섬 한강대교 백년다리 타당성 용역	백년다리(한강대교 보행교) 투자심사를 위한 설문조사 등 용역
용 역 비	52,200,000원	42,600,000원	감 9,600,000원

❍ 변경사유

- 지불의사 설문조사를 위한 용역이기 때문에 그에 따라 용역명칭을 변경

- 과업내용 및 범위의 축소에 따른 용역비 감액

향 후 계 획

❍ `19. 4. 15.	: 변경 계약 의뢰(→재무과)

붙  임  1. 변경 합의각서 1부.
2. 변경 과업내용서 및 변경 산출내역서 각 1부.  끝.