문서번호	시설관리과-3791
결재일자	2019.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
성기옥		代성기옥	04/15 이규상
협조

“아리수에 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

2019년 노후밸브 정비 추진

2019. 4.

상수도사업본부

(시설관리과)

2019년 노후밸브 정비 추진

내구성을 향상시키고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위하여 상수도 노후밸브 정비계획을 보고 드림.

□ 사업 개요

○ 사업내용 : 고장 또는 녹물발생 우려가 있는 ’94년 이전 회주철밸브 정비

○ 추진근거 : 상수도 밸브 종합관리계획(본부장 방침 제117호, ’07. 7.3)

노후밸브 정비 중장기 추진계획 변경(본부장 방침 ’16.10.10)

○ 사업대상 : 79,017개소 (비내식성 회주철 밸브, ’07년 기준)

○ 사 업 비 : 504,030백만원 (사업기간 ’08. ~ ’27년)

○ 연차별 투자규모                                  (단위: 개소, 백만원)

구 분	총계	기투자(～’18)			추진 계획
		소계	∼’17	’18	소 계	’19	’20~
정비수량	79,017	51,225	47,951	3,274	27,792	3,200	24,592
사 업 비	504,030	198,500	172,290	26,210	305,530	27,480	278,050

□ 2019년 정비계획

○ 정비목표 : 노후·고장 밸브 3,200개소

○ 소요예산 : 27,480백만원

○ 사업소별 정비대상                                 (단위: 개소, 백만원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부
목표수량	3,200	560	260	510	135	500	410	555	270	감리비
사 업 비	27,380	4,466	2,143	4,204	1,313	4,122	3,380	4,426	2,226	1,100

○ 2018년 정비실적                                        (단위: 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표		3,200	560	260	510	135	500	410	555	270
실적	계	3,274	597	268	512	146	509	400	566	276
	노후밸브 교체	2,378	168	210	457	118	484	375	347	219
	GIS속성 수정 (현장,속성 불일치)	896	429	58	55	28	25	25	219	57

□ 정비 방향

○ 안심 서울(마을) 조성, BSC 성과관리 대상사업으로서 사업소 목표관리 시행 ⇒ 사업소 경영실적평가에 반영, 분기별 목표관리(붙임 1)

○ 소·중블록 단위의 노후밸브를 일제 정비 추진

- 재개발·재건축 대상지 제외

- 노후 상수도관(송배수관, 배급수관) 정비 대상구간은 해당사업으로 정비

○ 대구경 노후밸브 정비시 단수가 어려운 지역은 부단수공법을 활용

⇒ 단가계약사업 발주시 부단수공종 반영 (필요시 단위사업 발주)

○ ‘대형 제수밸브 점검’ 결과 지적사항은 우선 정비

※ 본부 시설관리과-2640(’19.3.15), -1630(’18.2.23) 기 통보

○ 소구경 노후밸브 교체시 가급적 매몰형 중형밸브실 설치

○ 소방재난본부 관리대상 소화전용 노후밸브 정비(물량, 예산액 별도)

- 노후 상수도관(송배수관,배급수관) 정비, 소블록 배급수관망 개선, 단가계약(시설물 보수및설치, 급수공사)에 반영하여 정비

- 지하식소화전밸브실은 적벽돌쌓기가 생략된 ‘소화전실(축소형) 설치

- ‘소화전 설치·보수’ 사업의 예산과 구분되므로 분리 집행

□ 행정사항

○ ‘노후밸브 정비’ 실적 월보 제출 : 사업소 시설관리과 (익월 5일까지)

- 사업소별 분기 목표수량 고려하여 정비

○ ‘소화전용 노후밸브’ 정비 실적 제출 : 사업소 시설관리과(분기별)

- 전분기 실적을 다음분기 시작 월 5일까지 제출

붙임  1. ’19년 ‘노후밸브 정비’ 사업소별·분기별 목표관리 현황 1부.

2. ’19년 ‘노후밸브 정비’ 실적 제출양식(월보) 1부.

3. ’19년 ‘소화전용 노후밸브’ 정비 실적 제출양식(분기) 1부. 끝.