문서번호	원무과-5121
결재일자	2019.4.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	원무과장
김정만		代주성규	04/15 신욱재
협조

은평병원 보일러 1, 2호기 세관공사 계획

2018. 4.

서울특별시 은평병원

(원무과)

은평병원 보일러 1, 2호기 세관공사 계획

한국에너지공단의 계속사용 개방 및 성능 안전검사에 대비하고 에너지효율 제고를 위해, 보일러 1, 2호기의 세관작업을 실시하여 기계설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거

『에너지이용합리화법』제39조(검사대상기기의 검사) 제4항

※ 보일러 계속사용 안전검사: 개방검사(2년에 1회),

성능검사(연 1회)

검사대상기기 검사유효기간 만료일 사전 안내

【에너지관리공단 서울지역본부-1281(2018.12.05)】

【에너지관리공단 서울지역본부-1164(2018.11.06)】

시설현황

구분	기기형식	제조사	용량 (ton/hr)	설치년월	2019년 검사대상
***	*****	*****	***	********	************ ************
***		*******	***	*******	************ ************

작업내역

개방 및 성능 검사예정인 보일러 1, 2호기에 대해 화학세관 실시

보일러 세관 및 각종밸브 분해 정비

압력계, 계기류 분해 정비 및 교체

성능검사대비 버너연비 조정

응축수배관(기존 매립배관 D65*24M) 부분 교체 및 누수현상 확인

배관보온(유리솜 D65*25T+매직테이프 마감) 작업

시운전 및 사용중검사 수검

작업기간

보일러 세관 공사: 2019. 4. 22(월) ~ 4. 27(토)

보일러 검사(한국에너지공단)

- 보일러 1호기: 개방검사(4. 23.), 성능검사(4. 27.)

- 보일러 2호기: 개방검사(4. 25.), 성능검사(4. 27.)

계약방법: 수의계약

계약업체: **************

******************

사유: 기계설비공사업 또는 난방시공업 면허를 소지한 업체 중 비교견적이 저렴한 전문업체와 수의계약

근거:『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령  제25조 제1항 제5호

소요예산

❍ 소요금액***********************

❍ 예산과목: 연구활성화 및 시설환경개선으로 진료서비스 증진, 은평 병원운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각1부.  끝.