문서번호	교량안전과-6716
결재일자	2019.4.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	교량기획팀장	교량안전과장		안전총괄관
김용태	박동욱	代박동욱		04/15 하종현
협 조
	주무관		김시련

「샛강다리 목재데크 보수공사」

공사 발주 계획 보고

2019. 4.

안전총괄실

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「샛강다리 목재데크 보수공사」

공사 발주 계획 보고

여의도 샛강다리의 노후·파손된 목재데크 보수를 위한 “샛강다리 목재데크 보수공사“ 시행을 위한 발주계획을 보고 드림.

1		시설물 현황

○ 교 량 명 : 샛강다리(2주탑 역대칭 사장교)

○ 위    치 : 시울특별시 영등포구 신길동 ~ 여의도동

○ 법정구분 : 보도교(법정외)

○ 제    원

− 본  선 : B=3.6~5.6m, L=220m(강관트러스거더)

− 접속교 : B=4.5m, L=104m(강관거더)

○ 준공일자 : 2011.05.

○ 위치도 및 현황사진

위 치 도	전 경

2		공사개요

○ 공 사 명 : 샛강다리 데크 보수공사

○ 위    치 : 영등포구 신길동~여의도동(샛강 횡단)

○ 공사규모 : 목재데크 철거 및 설치 2,052㎡

○ 공사기간 : 착공일로부터 180일(6개월)

○ 사 업 비 : 700백만원

3		발주 계획

○ 특정제품 선정(특정제품 선정 심사위원회 개최 여부 검토)

− 특정제품 선정 심사 대상 : 해당

‣ 소요제품 규격·품질기준(KSF 3203), 시공방법(클립시공 가능), 구매조건(조달우수)을 만족하는 총 6개사의 제품을 비교·검토한 결과,

∙ 특정제품 품명당 5천만원 초과하여 심사대상 해당

「서울특별시 계약심사 업무처리 규칙」제5조의2

- 특정제품 선정 심사 대상 : 공사에 포함된 특정제품 품명당 재료원가가 5천만원 초과시

− 특정제품선정심사위원회 개최 : 생략

‣ 특정제품(공법) 선정 심사위원회 운영 방침[교량안전과-16226(‘18.9.14.)호에 따라 ‘견적가격 제출업체가 1개 사인 경우에는 심사위원회를 개최하지 않는다.’는 단서를 준용

「특정제품(공법) 선정 심사위원회 운영 방침」[교량안전과-16226(‘18.9.14.)호]

- 특정제품 선정 심사위원회 상정 대상

· 최저가 1개사 배제 후, 낮은 견적가 기준으로 최대 5개사를 심사 대상으로 선정

(단, 견적제출 업체가 1개사인 경우에는 심사를 개최하지 않음.)

‣ 시방규정(품질기준)등 모든 조건을 만족하는 제품 중에서 현장설치도 조건으로 조달청 가격정보(나라장터)에 게재된 업체가 1개사이므로 특정제품선정심사위원회에 상정할 비교대상이 없어 심사의 실익이 없는 점과 경제성 등을 고려하여 최저가격 제품(A사)으로 선정하고자 함.

<특정제품(목재데크) 공사 비교>

구분	규격	단위	수량	공사원가(원)			도급비+관급비 [제경비 포함] (천원)	비고
				계	자재비	시공비
A사 (1개사)	1000× 1000×76	㎡	2,052	275,000	275,000	-	567,148	현장설치도
B~F사 (5개사)	(2400~3000)×(145~150)×25	㎡		227,379 ~ 235,579	103,500 ~ 111,700	123,879	633,727 ~ 650,645	납품장소 하차도

※ 산출 기준

- A사의 현장설치도 조건으로 비교·검토를 위하여 검토대상 5개사(B~F)의 자재비에 시공비를 포함하여 계상

- 시공비는 2019 건설공사 표준품셈을 동일하게 적용(건축부문 제4장 4-3-2,4-3-3)

- 철거비 등 부대공종은 동일하게 미적용

- 관급자재에 조달수수료 포함

○ 공사 입찰 방법

− 입찰방식 : 제한입찰(지역제한)

· 추정가격 7억원 미만 전문공사

− 입찰참가자격

· 「건설산업기본법」시행령 제7조에 의거 입찰참가신청 서류 접수 마감일 (입찰참가등록 마감일)까지 시설물유지관리업에 등록한 자로서,

· 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울특별시에 주된 영업소를 둔 업체

4		추진 계획

○ ‘19. 4월 : 원가계산 및 계약심사 요청

※ 추정가격 기준 2억원 미만으로 일상감사 및 주계약자공동도급 활성화 관련 공종분리 적정성 검토 대상 아님.

○ ‘19. 4월 : 공사 발주

○ ‘19. 5월 : 관급자재 구매

○ ‘19.10월 : 공사 준공

붙임 : 제품 비교표 1부.  끝.