	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	AZA 인증 대비 시설개선공사 내용 변경 요청

우리과 제2AF관의 「AZA 인증 대비 시설개선공사」 대상 시설물의 공사 내용을 아래와 같이 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 요청 내역

변경 전 내용			변경 후 내용			변경 요청 사유
실명	보수내용	개수	실명	보수내용	개수
조리실 및 창고	파티션 설치	1	조리실 및 창고	자바라 설치	1	가변식 구획 분할
흰오릭스내실2	스테인레스 음수대 설치	1	하마 및 유제류 내실	콘크리트블럭 음수대 설치	11	기존 음수대 없음 음수대 신설 필요
격리실2,3	바닥 철거 후 콘크리트 THK50	2실	격리실2,3	바닥 철거 후 콘크리트 THK50	2실	변경 없음
남/여 화장실	환풍기 설치	2	남/여 화장실, 사육사실 화장실	환풍기 설치	3	사육사실 화장실 환풍기 신설
방사장조경3	슬로프 시설 설치	1	방사장조경2 (하마격리방사장)	슬로프 시설 설치, 마개형 배수구 설치 바닥 구배 공사	1	수조 위생 및 시설 관리 편의, 안전사고 예방
꼬마하마 방사장	다리철거	1	꼬마하마 방사장	다리철거	1	변경 없음
	2. 울타리 보강	1		2. 기둥형 울타리 보강	1	하마 행동 특성 반영
	3. 문 설치	5	하마2내실	슬로프 진입 차단문 설치	3	입방사 편의 및 안전사고 예방, 「제2AF관환경개선공사」시 기설치
			방사장조경2 (하마격리방사장)	슬로프 진입 차단문 설치
			하마관람실1 (피그미하마내실)	이동통로(복도) 차단문 설치
미어켓 방사장	1/3 철거 및 마감	1	미어켓 방사장	유리온실 2/3 철거 후 미닫이 유리문, 유리휀스 설치	1	도면내 생략된 세부내용 협의
	2. 문 설치	2		2. 유리 문, 유리 휀스 및 출입 계단 설치	2
※ 「서울대공원 국제인증대비 시설개선 공사」 설계도 도면번호 : 제2아프리카관 A-007 001 「AZA인증 관련 보수내용」 참고

첨부) AZA인증 대비 시설개선 공사(제2아프리카관) 설계도 1부.   끝.

	동물복지2과장
★주무관	지인환		주무관	이재황		동물복지2과장	04/15 송부용
협조자
시행	동물복지2과-1848	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개