문서번호	도시철도사업부-3625
결재일자	2019.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
원길묵		최문기	04/15 최병훈
협조	주무관		박형복
	주무관		정영호

건설공사 정보공유 및 소음ㆍ진동 저감 실적보고 (1분기)

2019. 4.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

건설공사 정보공유 및 소음ㆍ진동 저감 실적보고 (1분기)

공사현장의 주민갈등 요인을 해소함으로써 공기지연을 예방하기 위한 ‘건설공사 정보공유 및 소음·진동 저감 등 안전관리 방안’의 '19년 1분기 추진결과 보고임

□ 관련근거

○ 신년업무보고회(＇19.1.24.) - 민원으로 인한 공기지연 최소화 방안

○ 민원에 따른 공기지연 예방을 위한「건설공사 정보공유 및 소음ㆍ진동 저감 등 안전관리 방안」(도시철도사업부-1824호, '19.2.28.)

□ 추진배경

○ 건설공사 중 발생되는 위해 요인(소음, 진동 등)으로 생활불편 및 재산피해 발생

○ 대부분 시민이 생활권 내 공사정보 부족에 따른 오해로 불필요한 민원 제기 및 행정신뢰 저하

⇨ ‘집단민원, 언론보도 확대 우려’, ‘공기지연 요인으로 작용’

민원해소 및 공기지연 예방을 위해 “건설공사 정보공유 및 소음‧진동 저감 등 안전관리 방안” 수립

□ 그간 추진경과

○ '19. 1. 24. : 2019년도 신년 업무보고

○ '19. 2. 28. : ‘건설공사 정보공유 및 소음·진동 저감 등 안전관리 방안’ 수립

○ '19. 3.  4. : 방안 수립에 따른 공사 실행부서* 실적관리 협조요청

*토목부, 건축부, 설비부, 방재시설부, 도시철도사업부, 도시철도토목부, 영동대로복합개발추진단

□ 추진내용

○ 지역 주민과의「공사정보 공유 및 주민소통 강화」

- 공사정보 공유 … 터널 발파에 따른 ‘소음․진동 계측결과 알림판’ 설치, 공사 안내 현수막 게첨

- 주민소통 강화 … ‘주민설명회 개최’, ‘민원 소통함’ 설치하여 주민 의견 반영

○ 공사장「소음·진동 저감 및 안전관리 강화」

- 소음·진동 저감시설 설치, 소음·진동 저감공법 적용‧시행으로 환경 피해 민원 최소화

- 소음·진동 기준치(소음 주간 65dB, 발파시 75dB / 진동 0.3kine) 준수, 공사중 정시 발파

○ 건물피해 민원의 발생 시「단계별 대응 절차 이행」

‘민원사항’ 및 ‘위험요인’ 발생	⇨	공사관계자 현장점검 (1단계)	⇨	외부전문가 안전점검 (2단계)	⇨	(필요시)안전진단 전문업체 점검 (3단계)	⇨	원인규명 및 보수방안
		피해건물 공사관계자 최초 현장확인		건축구조, 토목구조, 토질및기초 분야		민원인 추천 전문업체(제3자)에 의뢰		필요시 환경분쟁위원회 신청

□ '19년도 추진현황 (※세부내용 : 붙임1 추진실적 보고서 참조)

○ ‘지역주민과의 공사정보 공유’ 현황 (43개 현장)

(단위 횟수 / 개소, 완료 / 계획)

구분	부 서	공사장	주민설명회			계측결과 안내판 설치			공사안내 현수막			소통 민원함			비 고
합 계		43	12	/	33	14	/	25	99	/	120	10	/	20
시설국	토목부	12	2	/	6	9	/	9	38	/	28	1	/	3
	건축부	12	1	/	2	-	/	2	19	/	19	2	/	2
	설비부	2	1	/	-	-	/	-	2	/	4	1	/	2
	방재시설부	8	1	/	3	-	/	2	12	/	28	2	/	4
도시 철도국	도철사업부	5	6	/	19	4	/	9	23	/	30	4	/	6
	도철토목부	4	1	/	3	1	/	3	5	/	11	0	/	3

주민설명회 (하남선1-1공구)	계측결과 안내판 (신림선3공구)	공사안내 현수막 (돈화문민요박물관)	소통 민원함 (국회대로 지하차도)

○ ‘공사장 소음·진동 저감’ 현황 (43개 현장) … 필요시 현장에서 선택하여 적용

(단위 개소, 완료 / 계획)

구분	부 서	공사장	소음·진동 저감시설 설치1)			소음·진동 저감공법 적용2)			저소음·저진동 기계 및 자재 사용3)			비 고
합 계		43	79	/	132	25	/	38	25	/	32
시설국	토목부	12	15	/	24	11	/	14	9	/	8
	건축부	12	11	/	16	1	/	3	3	/	4
	설비부	2	1	/	2	-	/	1	-	/	1
	방재시설부	8	11	/	17	4	/	4	1	/	4
도시 철도국	도철사업부	5	40	/	64	9	/	12	12	/	13
	도철토목부	4	1	/	9	-	/	4	-	/	2

1) 소음‧진동 저감시설 : 가설방음벽, 이동식 에어방음벽, 터널발파 방음문(커튼), 발파 방음덮개

2) 소음‧진동 저감공법 : 단면 분할발파 및 제어발파, 터널 굴진장‧장약량 축소, 미진동 암파쇄‧쉴드TBM 공법 등

3) 저소음‧저진동 기계 및 자재 : 무진동 항타기, 소음저감 브레이커, 압쇄기, 저소음 발전기 등

가설 방음벽 (제물포터널 1공구)	이동식 에어방음벽 (신림선1공구)	저소음, 무진동 천공기 사용 (딜쿠샤 원형 복원공사)	저소음 저진동 기계 사용 (별내선 2공구 쉴드터널)

□ 향후 계획

○ 추진실적 제출 (실행부서→도시철도사업부)

- 제출방법 : 공문 회신

- 제출시기 및 빈도 : 분기별 1회(6,9,12월 넷째주 수요일)

붙  임  1. 추진실적 보고서 1부.

2. 건설공사 정보공유 및 소음ㆍ진동 저감 등 안전관리 방안 1부.  끝.