문서번호	토목부-6510
결재일자	2019.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	도시고속도로과장	토목부장
박상철	명경출	04/16 김영수

공사 설계변경 및  3차공사 발주보고

(노들섬 특화공간 조성토목공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4

도시기반시설본부

(토 목 부)

제 목 : 공사 설계변경 및 3차공사 발주 보고

노들섬 특화공간 조성 토목공사(전체5회,2차제2회)의 공종을 현장 여건 변동에 맞게 설계변경하고 3차공사를 발주코자 검토 보고하는 사항임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 9.

○ 사 업 비 : 7,940백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주) / ○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 설계변경내용

○ 전체5회

▷ 주요변경사항

- 현장 여건에 맞게 물량 내역 조정

- 실정보고 사항 반영

▷ 변경내역

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증∙감	비 고
공 사 비	6,595,286	7,609,095	증)1,013,809
도 급 비	6,099,643	7,145,319	증)1,045,676
관급자재비	495,643	463,776	감)31,867

▷ 준공기한 : 변경없음

○ 2차제2회(정산)

▷ 주요변경사항

- 현장 여건에 맞게 물량 내역 조정

▷ 변경내역

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증∙감	비 고
공 사 비	3,529,948	2,826,987	감)702,961
도 급 비	3,463,955	2,763,970	감)699,985
관급자재비	65,993	63,017	감)2,976

▷ 준공기한 : 변경없음

○ 3차공사(발주,최종)

▷ 내역

(단위:천원)

구 분	발주금액	비 고
공 사 비	2,110,291
도 급 비	1,745,661
관급자재비	364,630

▷ 공사기간 : 2019.4.28.~2019.9.30.

▷ 소요예산

- 2018년 사고이월 2차공사 정산 후 예산 : 702,961천원

- 2019년 본 예산 : 1,535,000천원

□ 조치의견

◦ 책임건설사업관리기술자로부터 제출된 설계변경 내용을 전체공사,2차공사(정산) 및 3차공사(2019발주) 계약 물량으로 설계변경 하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 공사설계변경내역 2부.

2. 공사3차발주내역 1부.

3. 책임건설사업관리기술자 보고서 1부.  끝.