문서번호	토목부-6455
결재일자	2019.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	박일연	전결 04/16 김영수

상수도(D600,D300) 이설 및 측도 교통처리방안 현황보고

(남부순환로<개봉1동사거리 주변>평탄화공사)

2019. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

상수도 이설 및 측도 교통처리 방안 현황보고

(남부순환로<개봉1동사거리 주변>평탄화)

매봉초앞 측도 도로종단 상향구간에 매설된 상수도관에 대하여 유지관리부서로부터 상수관(D600,D300) 이설(상향) 및 측도 교통처리방안 현황보고  드림.

사업개요

○ 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사

○ 위    치 : 남부순환로 매봉초등학교 ~ 오류 IC간

○ 규    모 : 폭 30m(6차로), 연장 L=1.1km

○ 총사업비 : 31,000백만원

- 공사비 26,798백만원, 감리비 2,152백만원, 보상비 1,000백만원, 설계비 1,050백만원

○ 시공사 / 감리사 : (주)삼일기업공사  / (주)동일기술공사

추진경위

○ ‘17.06.02. : 민원사항 알림(남부교육지원청 재정지원과-8556호)

○ ‘17.06.02. : 주민건의사항 검토요청(구로 도로과-8079호)

○ ‘17.07.26. : 주민건의사항 검토요청(도로계획과-10779호)

○ ‘18.11.19. : 민원구간 공사추진 및 보완설게 시행방안(토목부-19524호)

○ ‘19.01.28. : 상수도관 업무협의 회신(급수운영과-4466호)

현  황

○ 매봉 초등학교 후문앞 이면도로의 명편교차 경사는 현재 17%로써 겨울철에 안전사고 및 화물차 진입등이 어려워 종단 하향 요구 민원에 의해 민원인 요구(안)으로 시행(토목부-19524호, ‘18.11.19)

- 민원인 : 매봉초등학교, 남부지원교육청, 한○○ 등

○ 상수도(D600, D300) 맨홀인상을 위하여 강서수도사업소 협의결과 기존 상수도관을 존치시 토피고가 증가(H=1.5m →3.0m)로 유지관리 어려움이 있으므로 이설요청 함.

검  토

○ 상수도(D600, D300)이설 시 매설심도는 표층으로부터 H=1.2m를 유지 요청함에 따라, 공사로 인한 교통불편 최소화를 위해 기존관은 폐관(콘크리트 충진) 조치하고, 신규로 상수관 부설이 필요함.

- 상수관로 이설

구 분	당 초	변 경	비 고
상수도관 규격	D600㎜ D300㎜	D600㎜ D300㎜	변경없음
상수도관 관종	- D600㎜ : CIP개량관 - D300㎜ : DCIP	- D600㎜ : DCIP - D300㎜ : DCIP
매설심도	- 현재 : 1.7m ~ 1.8m - 성토후 : 2.5m ~ 3.2m	- 1.2m	유지관리 곤란
이설연장	-	- D600㎜ : 218m - D300㎜ : 178m	승인조건 L=240m
이설공법	-	- D600㎜ : 단수 - D300㎜ : 부단수
기존관 처리방법	-	- 관내부 충진 및 마감 처리
개략공사비	-	증)447,759천원

○ 매봉초등학교앞 측도 상수도(D600, D300)이설에 따른 교통처리계획은 차량 통제없이 공사 시행이 필요한 실정이므로 톤마대 쌓기(1.0×1.0×0.7) 및 PC방호벽(610×1270×3000) 설치로 차량 통행에 원활이 필요한 실정임.

- 단면도

개략 공사비 증·감

(단위 : 천원)

구 분	금 액			비고
	당 초	변 경	증 · 감
상수도(D600,D300) 관로이설	-	447,759	증) 447,759
공사중 교통처리방안	-	53,430	증) 53,430
개략공사비	-	501,189	증) 501,189

감리 검토의견

○ 매봉초등학교엎 특도 도로종단 상향요청 밍원에 따른 상수도관로(D600mm, D300mm) 이설 및 공사중 교통우회 방안에 대해 검토한 결과 타당하다고 판단됨.

조치의견

○ 민원에 따른 매봉초앞 측도 도로종단 상향구간에 매설된 상수도관(D600mm, D300mm)에 대한 강서수도사업소 이설요청건 및 매봉초앞 상수도 이설 공사중 측도 교통처리 방안에 대하여 감리단 검토의견과 같이 조치하고자 하며.

○ 증액되는 개략공사비 501,189천원에 대하여는 지역주민 민원등 공사의 시급성을 감안하여 변경공법으로 우선 시공하고자 하며, 추후 상세공사비를 확정하여 실정보고 예정임.

붙임 : 1) 감리 검토의견서 1부.

2) 협의 공문 1부.

3) 민원구간 공사추진 방침서 1부. 끝.