문서번호	시설과-765
결재일자	2019.4.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
강희진		조민형	04/17 代김정미
협조

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」

실정사항(3차) 검토보고

2019. 4

동부공원녹지사업소

(시설과)

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」

실정사항(3차) 검토보고

보라매공원 테마물놀이터조성공사와 관련하여 실정사항 검토사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고 드림.

Ⅰ		공사 개요

❍ 공사명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사

❍ 공사기간 : 2018. 9. 10 ~ 2019. 4. 30

❍ 도급액 :************************

❍ 도급자 : ***************

❍ 공사내용 : 물놀이형 수경시설 및 기계설비 설치 등

Ⅱ		실정 보고사항 검토

❍ 현장 실정사항

구분	현황 및 문제점	검토요청 사항	비고
토공사	■ 설계서(절/성토) 내 토공물량 이 상호 불일치하여 현장 여 건에 맞게 조정 필요	■ 토공사 물량 조정 ▶ 터파기:415.81㎥→416.75㎥ ▶ 되메우기 및 다짐:415.40㎥→414.79㎥
시설물공사	■ 공사기간에 맞게 안전시설물 (가림막헨스) 설치기간 변경 필요	■ 연장된 공기에 맞게 가림막휀스 치 기간 조정 ▶ 가림막휀스설치 및 해체(H1.8×W3.0, 3개 월 ): 62경간→0경간 ▶ 가림막휀스설치 및 해체(H1.8×W3.0, 6개 월 ): 0경간→62경간
식재공사	■ 현장 여건에 맞게 기계실 주 변 녹지대 식재계획 조정	■ 현장 여건에 맞게 식재물량 조정 ▶ 잔디(0.18×0.18×0.03): 150㎡→100㎡ ▶회양목(H0.3×W0.3): 100주→400주 ▶화살나무(H0.8×W0.4): 300주→200주 ▶황매화(H1.0×W0.4): 170주→200주 ▶백철쭉(H0.4×W0.4): 200주→300주 ▶영산홍(H0.4×W0.5): 0주→300주 ▶산수유(H2.5×R8): 0주→5주
기타	■ 제경비(보험료 등) 사전정산	■ 제경비(보험료 등) 금액 실비로 조정

❍ 공사비 변경내역

구분		공사비(원)		증감(당초대비)	비고
		당초	변경
총공사비		***********	***********	감 123,000	개
도급비계		***********	***********	감 123,000	략
	공급가액	***********	***********	감 111,818	금
	부가세	**********	**********	감 11,182	액
관급자재비		**********	**********	-
폐기물처리비		**********	**********	-

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및

도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 보라매공원시설

물정비, 시설비및시설부대비, 시설비

Ⅲ		검토의견

❍ 상기 실정보고 사항에 대하여 설계변경 시행코자 함

❍ 계약부서에 설계변경 계약 요청

붙임 : 1. 서울시설공단 실정보고 승인요청 공문.  1부.

2. 서울시설공단 실정보고서 1부.

3. 변경내역서(개략금액) 1부.  끝.