문서번호	설비부-5596
결재일자	2019.4.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		녹색성장과장	설비부장
주광수		오삼록	04/17 代여인웅
협조
	주무관		정찬교

『구로 고가차도 철거 전기공사』

실정보고에 대한 검토 보고

2019. 04.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『구로 고가차도 철거 전기공사』

실정보고에 대한 검토 보고

우리 본부에서 시행중인「구로 고가차도 철거 전기공사」와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고 에 대하여 검토하고 보고 드림

１		공 사 개 요

공 사 명 : 구로 고가차도 철거 전기공사

위    치 : 구로구 가리봉동140 (가리봉파출소~LF팩토리아울렛구로점)

공사기간 : `18.04.27~`19.06.30

공사금액 : *************************************************

감 리 사 : ***************

시 공 사 : ******

공 정 율 : 23%

２		관 련 근 거

광안건(구) 2019-39호(2019.03.28.): 구로 고가차도 철거 전기공사(총차1회) 실정보고

광안건(구) 2019-44호(2019.04.11.): 구로 고가차도 철거 전기공사(총차1회) 변경 실정보고(설계사 의견 포함)

광안건(구) 2019-47호(2019.04.17.): 구로 고가차도 철거 전기공사(총차1회) 변경 실정보고 보완

３		주요변경 내용

임시 투광등 설치

- 설계상 기존에 사용하는 가로등기구(메탈등24개소)를 철거하여 현장      의 임시펜스에 설치하여 운용 계획 되었으나, 잦은 이동설치로 비용이      많이 소요되므로, 주변시설물(한전주)을 이용하여 현장여건에 맞게 변경함

∙ 주변시설물(한전주) LED투광등(20개소)설치

∙ 주변시설물을 사용하지 못하는 구간은 보행자의 안전을 위해 지주

(3개소) 설치

세부변경 내용

공정	품 목	변경내용	검토결과	증․감액
임시조명 및기존가로등철거공사	○ 가로등 등기구(재사용철거)	- 가로등 등기구(재사용철거) 24개소 → 0개소	- 기존 등기구 재사용철거 없으 므로 물량삭제	감)1,026천원
	○ 임시조명 설치	- 임시조명(강관H:6m) 24개소 → 0개소	- 기존 등기구를 임시펜스에 설치 불가	감)3,059천원
	○ 기존 가로등기구 설치	- 기존 가로등기구 24개소 → 0개소	- 기존 등기구를 임시펜스에 설치 불가	감)2,052천원
	○ 방수형 누전차단기 설치	- 방수형 누전차단기 24개소 → 0개소	- 임시투광기 설치로 인한 물량 삭제	감)1,140천원
	○ 전원선 포설(가공)	- F-CV,6SQ-3C케이블 352m → 0m	- 케이블설치 구간 간소화로 인한 규격변화로 물량삭제	감)1,875천원
		- F-CV,10SQ-3C케이블 398m → 0m	- 케이블설치 구간 간소화로 인한 규격변화로 물량삭제	감)2,570천원
		- F-CV,10SQ-2C케이블 100m → 30m	- 전원인입선 변경으로 인한 물량감소	감)297천원
	○ 지주기초 설치	- 지주기초(500×800×1000H) 미반영 → 3개소	- 현장여건에 따른 물량증가	증)493천원
	○ 투광등 설치	- 투광등(LED100W) 미반영 → 23개소	- 현장여건에 따른 물량증가	증)6,420천원
		- 투광등용 지주(Φ150×8m) 미반영 → 3본	- 현장여건에 따른 물량증가	증)2,880천원
	○ 투광등 철거	- 투광등(LED100W) 미반영 → 23개소	- 현장여건에 따른 물량증가	증)407천원
		- 투광등용 지주(Φ150×8m) 미반영 → 3본	- 현장여건에 따른 물량증가	증)364천원
	○ 전원선 포설(가공)	- F-CV,4SQ-3C케이블 미반영 → 720m	- 현장여건에 따른 물량증가	증)3,664천원
	○ 전원선 철거(가공)	- F-CV,4SQ-3C케이블 미반영 → 720m	- 현장여건에 따른 물량증가	증)1,257천원
		- F-CV,10SQ-2C케이블 미반영 → 30m	- 현장여건에 따른 물량증가	증)35천원
	○ 가로등제어반 철거	- 가로등제어반 미반영 → 2면	- 현장여건에 따른 물량증가	증)181천원
	○ 고재처리	- 고재처리(제련동) 미반영 (제어반등) → 70kg	- 현장여건에 따른 물량증가	감)437천원
소 계				증)3,245천원
제경비(부가가치세 포함)				증)942천원
합 계				증)4,187천원

４		건설사업관리기술자 의견

시공사에서 제출한 실정보고를 검토한 결과 관련 법규, 기술기준, 현      장여건과 적합하게 반영되었다고 판단됨

５		보고자 의견

위 실정 보고 사항은 임시투광등 설치을 현장여건에 맞게 변경한 사항     으로, 건설사업 관리자의 보고 내용이 적정하다 판단되므로 실정보고      승인하고 추후 설계변경에 내역 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리단 실정보고 승인요청(검토의견서 포함)   1부.  끝.