문서번호	관리과-4563
결재일자	2019.4.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
양희원		이희신	04/17 이성재
협조
	운영과장		최영효

슬러지건조시설 예비품 보관창고

증축공사 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

중랑물재생센터

관리과

- 슬러지건조시설 예비품 보관창고 -

증축공사 시행 계획

슬러지건조시설 내 예비품 보관 공간 부족에 따른 보관창고 설치 계획 과 관련 아래와 같이 증축공사를 시행하고자 함.

1		추진 개요

□ 공 사 명 : 슬러지건조시설 예비품 보관창고 증축공사

□ 위    치 : 성동구 자동차시장3길 64, 중랑물재생센터 내

□ 공사규모 : 지상1층, 면적 약 90㎡

□ 용도 및 구조 : 자원순환관련시설(부속창고), 철골조(샌드위치판넬조)

□ 사업예산 : 100,000천원

□ 추진근거 : 운영과-2392호(2019. 3. 28.) ‘슬러지건조시설 예비품 보관창고 설치 계획’ 관련

2		추진 계획

□ 설계(감리)용역 시행

1) 용 역 비 : 4,560천원

○ 설계용역비 : 2,805천원, 감리용역비 : 1,755천원

(기술용역타당성 심사결과에 따라 조정)

2) 용역기간

○ 설계용역 : 2019. 4. ~ 5. (착수일로부터 30일)

○ 감리용역 : 착수일로부터 준공일까지

3) 계약방법 : 수의계약

○ 입찰참가자격 : 입찰공고일 기준「건축사법」에 의한 건축사 면허 소지자 및 건축사사무소를 개설한 등록한 업체로서 주된 영업소가 입찰일까지 서울특별시에 소재한 업체

□ 도급공사 시행

1) 공 사 비 : 90,000천원

2) 공사기간 : 2019. 6월 ~ 7월 (착수일로부터 60일)

3) 공사방법 : 철골구조(샌드위치판넬조)

4) 계약방법 : 제한경쟁입찰

○ 입찰참가자격 :「건설산업기본법 시행령」제7조 규정에 의한 일반건설업 중 건축공사업 또는 토목건축공사업 면허를 보유한 업체로 입찰일까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 자

□ 사업예산 : 100,000천원

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

3		향후 일정

□ 2019. 4. : 기술용역 타당성 심사

□ 2019. 4.~5. : 설계용역

□ 2019. 5. : 공사발주

□ 2019. 5.~6. : 공사착공 및 시행

□ 2019. 7. : 공사완료 및 준공

붙 임. 1. 시행계획 방침 1부.

2. 설계(감리)용역 내역서 1부.  끝.