문서번호	계약심사과-16677
결재일자	2018.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		심사총괄팀장	계약심사과장
임장경		류종기	10/19 代류종기
협 조
	토목심사1팀장			윤병헌

홍제천고가교(북부1,2공구) 외 2개소 보강공사 설계VE·계약심사 통합심사 실행계획

2018. 10.

계약심사과

홍제천고가교(북부1,2공구) 외 2개소 보강공사

설계VE·계약심사 통합심사 실행계획

서울시설공단에서 시행하고 있는「홍제천고가교(북부1,2공구) 외 2개소 보강공사 실시설계」에 대해 VE전담팀을 구성하고, 설계VE·계약심사 심사 계획을 수립하여 추진하고자 함.

□ 추진 근거

○ 건설기술진흥법 시행령 제75조

○ ’18년 설계경제성(VE) 심사 운영계획(계약심사과-579, ’18.1.11)

□ 심사 개요

○ 신청부서 : 서울시설공단(도로시설처)

○ 사 업  명 : 홍제천고가교(북부1,2,공구) 외 2개소 보강공사

○ 위    치 : 성산대교 북단~서대문구 홍제동~서대문구 홍은동

○ 사업내용 : 홍제천고가교(북부1,2공구) 내진보강공사

- 사업규모 : 본선 6,978m, 램프 8개소 3,415m

○ 공 사 비 : 25,500백만원

○ 용역기간 : ’17.12. ~ ’18.12.

○ 설계공정률 : 90%

□ 심사 계획

○ 주요 심사내용

- 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

- 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

- 시설물 안전 및 기능 향상의 가능성

- 설계예산서 도서간 일치 여부 및 공사원가 적정성 등

□ 시행 방법 : VE전담팀을 구성하여 심사

○ VE전담팀, 발주부서, 설계사, 주관부서 등 16명 내외

구성원	구성내용	역할
VE리더	▸ 임종권 위원 승화기술정책연구소	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	▸ 명재상 요원 승화기술정책연구소
VE업무총괄	▸ 임장경 주무관 계약심사과	․ 설계VE 계획, 회의지원 등
외부 검토위원 (4개분야)	▸ (토목구조) 최용기 위원 ㈜대한콘설탄트 ▸ (토목구조) 김규형 위원 동부엔지니어링 ▸ (토목시공) 안삼현 위원 ㈜진우엔지니어링 ▸ (토목시공) 하진수 위원 동부엔지니어링	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
내부 검토위원 (1개분야)	▸ (토목) 허원도 주무관 계약심사과	․ 설계도서 형식 검토 ․ 계약심사
발주부서	▸ 김상아 차장 서울시설공단(도로시설처)	․ 사업설명, 제안서 검토
설계자(6명)	▸ 서현우 부장 ㈜동명기술공단종합건축사 ▸ 분야별 설계자	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE․계약심사 통합심사 회의 세부일정

일 시	내 용
’18.10.26(금) 10:00~17:00	- 사업설명 및 현장답사, 기능분석・정리 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실 및 사업대상지
’18.10.30(화) 10:00~17:00	- 검토회의 : 대안 구체화, 설계도서 형식검토 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’18.11.7(수) 10:00~17:00	- 최종검토회의 : 제안 채택회의, 설계도서 보완 통보 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’18.11.21(수)	- 설계도서 수정본 제출 (서울시설공단 ⇒ 계약심사과)
’18.11.30(목)	- 설계VE․공사원가 통합심사 결과 통보

□ 설계VE 심사 시행절차

구분		추진 일정		수행 절차		추진 내용
계획수립		’18.10.5		설계경제성 심사 신청 (발주부서)		▸ 심사 신청서 접수
		’18.10.19		설계VE․계약심사 통합심사 계획수립 (계약심사과)		▸ 추진일정, 시행방법 등 ▸ 설계VE팀 구성
설 계 VE ․ 계 약 심 사 통 합 심 사 운 영		’18.10.26 ~ ’18.11.7 (1일차~13일차)		설계VE 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (VE전담팀)		▸ 자료 사전검토 ▸ 사업설명 및 현장답사 ▸ 1,2차 워크숍 - 대안발굴, 제안서 작성 - 설계예산서 검토 - 설계제안 채택회의 ▸ 최종 검토회의 : 의사결정
		’18.11.8 (14일차)		VE 제안서 통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ VE 제안서 통보
		’18.11.21 (27일차)		설계도서 수정 및 제출 (발주부서 → 계약심사과)		▸ 설계도서 수정 및 제출
		’18.11.22 ~ ’18.11.29 (35일차)		계약심사 (계약심사과)		▸ 분야별 계약심사 ▸ 설계VE 결과보고서 작성
		’18.11.30 (36일차)		통합심사 결과통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ 심사결과 통보

□ 소요예산 : 8,215천원

○ 외부위원 수당 : 7,715천원

- VE리더(기술사+보고서작성)  : 2,448천원(2,448천원 × 1명)

- 검토위원(기술사)           : 4,524천원(1,131천원 × 4명)

- 진행보조요원(초급기술자)    : 743천원(743천원 ×1명)

※「설계VE 위원 수당 지급기준 개선 계획」(계약심사과-15310, ’18.9.20)에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 지급부서

○ 신청부서(서울시설공단)에서 외부위원 수당 지급

○ 계약심사과에서 회의운영비 지급

□ 향후계획

○ 설계VE․계약심사 통합심사 결과 통보 ----------  ’18.11.30

붙   임 : 1) 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2) 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.