투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	남산공원 식생조사 및 정비계획 수립용역 완수기한 연기 의뢰

1. 녹지관리과-1372호(2019.4.16.)와 관련입니다.

2. 남산공원 식생조사 및 정비계획 수립용역 완수기한을 아래와 같이 연기의뢰 합니다.

가. 용 역 명: 남산공원 식생조사 및 정비계획 수립용역

나. 위    치: 남산공원

다. 규    모: 2,896,887㎡

라. 용역내용

1) 남산공원 현존 식생조사 및 진단

2) 남산공원 연차별 사업 및 유지관리 계획

3) 남산의 역사성과 현재의 산림생태계를 고려한 주요사업 구상

마. 계약금액: ************************

바. 계 약 자: *****************************

사. 완수기한 연기기간

1) 당   초: 2019. 2. 18. ~ 4. 18.

2) 변   경: 2019. 2. 18. ~ 4. 30.

아. 완수기한 연기사유: 설계심의 등 절차이행에 따른 용역기간 부족

자. 연기사유 귀책소재: 중부공원녹지사업소

차. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  1. 완수기한 연기 보고서 1부.

2. 완수기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	녹지관리과장
주무관	정주희		녹지관리과장	04/17 권종화
협조자
시행	녹지관리과-1406	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 (예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5944	/전송	02-3783-5949	/	jjh0522@seoul.go.kr	/	부분공개(5)