문서번호	기술국-2932
결재일자	2019.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
기술관리팀장	기술관리부장	기술국장		교통방송 대표
김응석	김성규	봉우종		04/18 이강택
협 조
	기획조정실장		이동률
	경영지원부장		이준연
	재무팀장		조경제

tbs 통합송신소 기반시설 구축 계획

2019. 4.

교통방송 기술국

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

tbs 통합송신소 기반시설 구축 계획

전기, 실내인테리어, 소방 등 통합송신소 기반시설 구축으로 영어FM방송 및 교통FM방송 통합송신소 구축 운영함에 있어 만전을 기하고자 함.

1

추 진 근 거

tbs 영어FM방송 도입운영 계획

(서울특별시장 방침280호, 2008.5.27.)

남산송신소 관악산 이전계획(안)

(기술국-4639호, 2017.5.31.)

「tbs 교통방송 통합송신소 구축」 구매 설치 계획

(기술국-388호, 2019.1.15.)

2

사 업 개 요

사 업 명 : tbs 통합송신소 기반시설 구축

사업기간 : 2019. 4. ~ 2019. 9. (예정)

사업장소

○ 경기도 과천시 자하동길 64 ㈜넥스콘테크놀러지 2층

추진배경

○ 관악산 송신소 1층에서 4층으로 교통FM ‧ 영어FM 통합송신소 구축          확장 이전

- 관악산 송신소 4층 현재 공실

- 방송시스템 설치전 송신 조정실 및 기계실 기반시설 구축 필요

‧ 실내 인테리어, 전기(UPS시스템 포함), 소방시스템 설치 공사

○ 통합송신소 구축 방송시스템 부분 계약 및 장비운반

- 송신기 등 송신소 장비 설치 일정 도래

- 장비와 공사 자재 동일시기 헬기 운반

사업내용

○ 실내 인테리어 공사

- 통합송신소 송신조정실 및 기계실 벽체 칸막이 설치

- 벽체 단열 및 기타 도장 등 인테리어 공사

- 화장실 보강 공사

○ 전기 공사

- 방송시스템 전원 인입 간선 포설

- 실내 LED 전등 및 스위치, 콘센트 설치

- 조정실 전기온돌 판넬 설치

○ UPS 시스템 이전 설치 용역

- 현재 사용중인 UPS 시스템 이전 설치 (1층 → 4층)

- UPS 배터리 교체 설치

○ 소방 설비 설치 공사

- 통합송신소 기계실 가스소화설비 설치 공사

3

소 요 예 산  및  계 약 방 법

********************

○ 예산과목 : 교통방송 기획조정실, 방송운영 및 관리, 방송시설 및

장비관리, 방송장비유지관리

*********************

○ 통합송신소 구축 관련 공사로 명시이월 예산(시설비) 낙찰차액 포함

세부사업별 소요예산 및 계약방법

	사 업 명	계약방법	분류	소요예산(원)
1	**********************	**** ****	용역	***********
2	***********************	****	공사	***********
3	***************	****	공사	***********
4	******************	****	공사	***********
*****				***********

적용 규정

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조             (수의계약에 의할수 있는 경우)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 수의계약 운영요령

- 1인견적 수의계약 : 추정가격 2천만원 이하 공사

- 2인견적 수의계약(전자공개수의계약) : 추정가격 5천만원 이하 용역

4

추 진 일 정

추진 일정

○ ’19. 4월 : tbs교통방송 통합송신소 구축 공사 계약 계획 수립

○ ’19. 4월 : 사업분야별 계약

○ ’19. 5월 ~ 6월 : tbs교통방송 통합송신소 구축 공사

○ ’19. 6월 ~ 8월 : tbs교통방송 통합송신소 방송시스템 설치

○ ’19. 8월 ~  : tbs교통방송 통합송신소 구축완료 및 운영

5

기 대 효 과

통합송신소 방송시스템 기반 시설 확보

차질없는 통합송신소 방송시스템 설치

안정적인 tbs교통방송 통합송신소 구축 운영

끝.