문서번호	한양도성도감-4047
결재일자	2019.4.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬		곽동진	04/18 진용득
협 조

1차 공사 설계변경 검토보고(제4회)

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

문  화  본  부

(한양도성도감)

1차 공사 설계변경 검토보고(제4회)

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성)

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관」의 보호각 기둥위치 변경에 따른 처리계획을 보고 드림

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명: 남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성

□ 위    치: 중구 소파로 46외 13필지(사업지 면적 43,630㎡)

□ 공사기간: 2018.11.23.~2019.11.22.(12개월)

□ 문화재수리업자: 원택건설㈜, 명헌건설㈜ *****************

□ 문화재감리업자: ㈜금성종합건축사사무소 ***************

□ 공사내용

· 성곽유구 보호시설 1,440㎡, 인포센터 280㎡, 관람데크 143m

· 유구 보존처리, 멸실구간 흔적 형상화 74m, 토목·배수공사, 조경공사

Ⅱ		설계변경 내용

□ 변경사유

- 현재 설계상 기둥위치는 발굴 유적지내 ************************************지장이 없도록 구조기술사의 구조안전성 검토를 거쳐 기둥간격 변경

□ 관련근거

- 공사계약 일반조건 제19조(설계변경 등)

- 서울특별시 공사계약 특수조건 제13조(발주기관의 필요에 의한 설계변경)

□ 설계업체 및 비용

- 설계업체: ㈜건축사사무소협동원, 조선건축사사무소(문화재실측설계)

☞ 현장 유적박물관의 최초 설계자가 설계변경을 검토·수행하는 것이 비용절감 및 신속한 공정진행을 위해 효율적임

- 설계비용: 11,790만원(부가세 별도)

※ 설계변경 비용 반영 시 경비에 반영하여 산정

	참고 < 그 동안 설계변경 내용 >
- 1회 설계변경: 기존 가설울타리 정산 검토보고(2019.1.16.) - 2회 설계변경: 공사현장 관리용 출입문 설치 - 실정보고 승인(2019.2.18.) - 3회 설계변경: 가설울타리 활용 한양도성 홍보 검토보고(2019.3.22.)

Ⅲ		처리의견

□ 한양도성 현장 유적박물관 조성공사의 감리자 및 시공자에게 당초 설계자(㈜협동원,  조선건축)와 설계변경을 협의·작성토록하고 결과(변경 설계도서)에 따라 시공에 반영토록 함

□ 설계변경 비용 및 시공비는 별도의 설계변경 절차에 따라 처리하고자 함

붙임: 구조설계 및 도서작성 등 설계견적서 1부.  끝.