＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경 시행 및 계약의뢰

우리 사업소에서 시행중인 「2018년 전기시설물 유지보수 2차 공사(2차)」 건에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 계약건명 : 2018년 전기시설물 유지보수 2차 공사(2차)

2. 계약업체 : ***************

3. 공사기간 : 2차 - 2019.01.01.~2019.05.31.

총차 - 2018.10.12.~2019.05.31.

4. 설계변경 내용 (총차, 2차)

	당 초	변 경	비 고
계약금액	69,505,840원	55,075,900원	감14,429,940원

5. 설계변경 사유 : 보험료 정산 및 물량 변경에 따른 계약내역서 변경.

6. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

【(05)수선유지비, 가압장.배수지 기전설비 유지보수】

붙 임 :1. 보고서           1부.

2. 설계변경 내역서  1부.  끝

.

	시설관리과장
주무관	이동기		기전팀장	김충완		시설관리과장	04/18 허준행
협조자
시행	시설관리과-10285	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 시설관리과 (장충동2가)	/
전화	02-3146-2226	/전송	02-3146-2239	/	ilovey2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)