결산검사위원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-5774	(		)
접 수		(		)
결재일자	2019.4.18.
공개여부	대시민공개
수 신 자	내부결재

주무관	치수관리팀장	하천관리과장	물순환안전국장		결재
송석주	정한영	한유석	04/18 이정화
협 조

제 목	결산검사위원 요구 자료 제출(2019-65)

따로붙임 :  결산검사위원회 요구자료 1부.  끝.

결산검사 요구자료 2019-65

망원배수구역 빗물저류조 설치 관련 추경편성 사유와 산출근거, 불용사유

□ 위원님께서 요구하신 자료에 대하여 아래와 같이 제출 합니다.

부서명	사업명	추경편성 사유	추경액 산출근거	불용사유
하천 관리과	망원배수구역 빗물저류조 설치	국비보조금 매칭비율 (50:50) 확보	국고보조금 매칭비율에 따른 500백만원	단기사업이후 모니터링 결과에 따라 향후 저류조설치 하는 것으로 설계변경됨

- 추경편성사유 및 산출근거

· 2018년 제283회 임시회(도시안전건설위원회)시 국고보조금 500백만원 세입 추경사유 설명

[행정안전부 재난영향분석과-2752호(2017.12.27.)에 의거 시비 추경확보]

- 불용사유

· 해당지역에 대하여 단기사업(빗물펌프장, 하수관로설치 등) 시행후 침수양상 모니터링을 통해

장래에 저류조를 설치 하는 것으로 검토됨

붙임 : 1. 국고보조금 확정 및 추진지침 1부.

2. 망원배수구역 배수개선대책 추진계획 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	정한영
	☎2133-3870	담당자	송석주
	작 성 일 : 2019.04.17