문서번호	하천관리과-5825
결재일자	2019.4.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하천계획팀장	하천관리과장
김우환	이승우	04/19 한유석
협 조

『홍제천 상류 자연성 회복 및 경관복원 시범사업』

설계변경 검토보고

2019. 4.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	■	□

- 홍제천 상류 자연성 회복 및 경관복원 시범사업 -

설계변경 검토보고

가시설 흙막이 시공 중 직경이 큰 전석층이 발견되어 기 설계된 가시설공법 적용이 어려워 건설기술자문위원회를 개최후 대체 시공방법을 적용한 사항에 대해 설계변경코자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 홍제천 상류 자연성 회복 및 경관복원 시범사업

○ 공사기간 : 2018. 6. 4. ~ 2019. 5. 30.

○ 공사업체 : 신성종합건설㈜ 대표 이강용

○ 공 사 비 : 833,252천원

○ 공사내용 : 석축(산성석) 쌓기, 하상정리 등

추진경과

○ ‘17. 12. 22.	공사 착공

○ ‘18. 06. 30.	차집관로 정비 완료(213m)

○ ‘18. 11. 27.	외부 전문가 합동 현장조사

○ ‘18. 11. 30.	석축(산성석) 쌓기 일부구간 완료(50m)

○ ‘19. 01. 31.	건설기술자문위원회 개최(종로구)

○ ‘19. 04. 15.	일상감사 완료(종로구)

설계변경 내용 및 사유

○ 흙막이 가시설 공법 변경

구 분	당 초	변 경	사 유
가시설 공사	H.G.S.S ANCHOR	강관+그라우팅	․인근 지반조사 결과(퇴적층 : 모래섞인 자갈 Φ6㎝)와 달리 전석층(Φ20~50㎝)이 발견되어 공법변경 ․외부전문가 현장조사 및 자문의견 반영

○ 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
총 공사비	833,252,820	1,006,943,310	증)173,690,490
도 급 비	497,704,660	676,100,000	증)178,395,340
관 급 비	308,804,160	301,893,310	감) 6,910,850
계측관리비	19,557,000	21,090,000	증) 1,533,000
이 전 비	7,187,000	7,860,000	증) 673,000

○ 검토의견

- 직경이 큰 전석이 발견되는 현장여건상 기존 가시설 공법으로는 가시설의 안정성 확보가 불가하여 전문가 현장조사 및 건설기술자문위원회를 통해 가시설 공법 변경 추진한 사항으로, 변경공법에 대한 구조검토결과 안정성이 확보되는 것으로 검토됨

- 외부전문가에 의한 현장조사 및 건설기술자문위원회의 의견을 반영하여 변경한 사항으로 구조물의 안정성 확보를 위해 가시설공법 변경 필요함

행정사항

○ 하천관리과 : 예산 재배정

○ 종로구 치수과 : 설계변경 및 정산 시행

※ 예산과목 : 물순환안전국 하천관리과 / 치수 및 하천관리 / 하천복원 및 정비 / 홍제천 상류 자연성회복 및 경관복원 시범구간(1구간) 조성사업

향후계획

○ ‘19.04월 : 공사 시행중(변경 공법 적용)

○ ‘19.05월 : 홍제천 시범사업 준공

붙    임 : 1. 위치도 및 현장사진(전석층) 1부.

2. 기존 지반조사 결과(조사위치도 및 시추주상도)

3. 시공단면도 1부.

4. 설계변경 내역서(가시설) 1부.

5. 일상감사 결과 1부.  끝.