문서번호	설비부-5817
결재일자	2019.4.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		여인웅	04/22 임정규
협조

『노들섬 특화공간 조성 전기공사』

관급자재(조명제어설비) 납품기한 연기보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『노들섬 특화공간 조성 전기공사』

관급자재(조명제어설비) 납품기한 연기보고

『노들섬 특화공간조성 전기공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 관급자재인 조명제어설비의 납기연기에 대해 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 전기공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.16. ~ `19.5.15.

□ 도 급 비 : ********

□ 계 약 자 : ㈜코에버정보기술 외 2

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `19.04.22. : 노들섬 특화공간 조성 전기공사 관급자재(조명제어설비) 납품기한 연기요청[유탑노들 제19-159호)

□ 관급자재 계약 현황

품 명	계약번호 (구매관리번호)	계약자	계약금액	납품기한	비고
조명제어설비	*********** *************	****	**********	2019.05.31

□ 납품기한 연기 현황

○ 사 유 : 건축공사기간 연기(2019.8.31.)에 따라 후속공정인 통신공사 공정 미도래로 관급자재 납품시기 연기 필요.

○ 연기 현황

품 명	계약번호 (납품요구번호)	계약자	납품기한		비고
			당초	변경
조명제어설비	*********** *************	****	2019.05.31	2019.08.31

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 운영자 요청 및 동측 공사기간 연장 변경에 의거 선행공정 일정에 따른 관급자재 납품기한을 연장 변경이 타당하다고 사료됨.

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리단의 관급자재(조명제어설비) 납품기한 연기 요청사항 검토 결과 요청내용이 적정한 것으로 판단되어 납품기한 연기하고자 하며, 총무부에 변경계약 의뢰 하고자 함.

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.