문서번호	설비부-5813
결재일자	2019.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
호정오		김은덕	전결 04/22 임정규
협조

『양평1유수지 CSOs 저류조설치 전기공사(1차)』

생태체육공원 실정보고 내용 검토 보고

2019. 4.

도시기반시설본부

[설  비  부]

『양평1유수지 CSOs 저류조설치 전기공사(1차)』

생태체육공원 실정보고 내용 검토 보고

「양평1유수지 CSOs 저류조설치 전기공사(1차)」와 관련 책임건설사업관리기술자가 제출한 생태체육공원의 추가의견 시행을 위한 추가설계 필요성에 대한 실정보고 내용을 검토하고 결과를 보고함.

공사개요

□ 공 사 명 : 양평1유수지 CSOs 저류조설치 전기공사(1차)

□ 공사위치 : 영등포구 국회대로22길 20(양평1유수지 내)

□ 공사규모 : CSOs 저류조설치(Q=46,000㎥)

□ 공사내용 : 수배전설비, 건축전기설비, 계측제어설비, 소방설비 등

□ 계약금액 : 100,000,000원(총차 654,268,420원)

□ 공사기간 : 2018.05.15. ~ 2019.05.31.(총차 2019.09.30.)

□ 계약업체 : 제이엠스테이지(주)-전기, ㈜진실로건설-소방

□ 감리업체 : ㈜경동엔지니어링 외 3개사

관련근거

□ ㈜경동엔지니어링 양평1유건 제2019-131호(2019.04.22.)

- 생태체육공원 추가의견에 대한 시행방안 보고

검토내용

□ 추가설계 필요성에 대한 내용 검토

- 생태체육공원 산책로의 보안등 조명 설치

- 설비동 및 전망대 측에 CCTV 설치

- 집중호우 시 진입금지 및 대피안내를 위한 경보시스템 설치

감리단 의견

□ 생태체육공원 보안등 조명 설치, 안전을 위한 CCTV 및 경보시스템 설치를 위하여 전문적인 전기설계사무소에 추가설계를 시행하는 것은 적정한 것으로 판단

검토결과 조치계획

□ 감리단 검토의견이 적정한 것으로 판단돼 생태체육공원의 추가의견 시행을 위한 전기설계 필요성에 대한 실정보고 내용을 승인

□ 추가설계는 도급공사에 포함하여 시행하고 향후 설계변경시 반영

- 설계자 및 설계소요 금액은 감리단에서 검토 후 제출

붙임  생태체육공원 추가의견에 대한 시행방안 보고 1부. 끝.