투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	변경계약의뢰(우이천 외6개 하천 차집관로 보강공사 실시설계용역)

1. 시설보수과-2308(2019.4.22.)호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 추진중인 『우이천 외 6개 하천 차집관로 보강공사 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 기간연장에 따른 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 우이천 외 6개 하천 차집관로 보강공사 실시설계용역

나. 용역내용 : 가오천, 대동천, 백운천, 성북천, 우이천, 인수천, 화계천, 차집관로 시설물 보수ㆍ보강 공사 실시설계

다. 용역기간 : 2019.02.27.~2019.04.27

라. 용 역 비 : 20,691,000원

마. 용 역 사 : ㈜동해종합기술공사 대표 정점래

바. 변경현황

- 준공기한 연기

• 당초 : 2019.02.27.~2019.04.27.

• 변경 : 2019.02.27.~2019.05.31.

- 연기사유 : 「하수암거 보수공사 개선방안 추진 및 특정공법 선정 심사위원회 및 개선 확대시행(물재생시설과-4610, 2019.4.3.)」에 따른 용역기간 연장

- 지체상금부과 여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기 검토 보고서 1부. 끝.

	시설보수과장
주무관	김원선		주무관	이석근		시설보수과장	04/22 代안종필
협조자
시행	시설보수과-2316	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 본관 3층 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2574	/전송	02)2211-2579	/	kws325@seoul.go.kr	/	대시민공개