투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	선유도공원 전망데크 정비공사 설계변경 시행

1. 여의도공원관리사무소-991호(2019.4.22.)와 관련입니다.

2. 선유도공원 전망데크 정비공사 중 현장여건에 따른 따른 물량변경 발생에 대해 아래와 같이 설계 변경하여 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 선유도공원 전망데크 정비공사

나. 공사기간 : 2019. 3. 25. ~ 2019. 4. 23.

다. 총공사비 : 금35,897,000원

라. 공사내용 : 데크계단철거 및 데크계단 설치 1식

마. 변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총 공 사 비		35,897,000	35,480,000	감) 417,000
도급비	공 급 가 액	32,633,637	32,254,546	감) 379,091
	부가가치세	3,263,363	3,225,454	감) 37,909
관급자재비		6,052,500	6,052,500	0

바. 계 약 자 : 고성조경(주) 대표 최정인(서울특별시 성북구 화랑로 210-6)

사. 변경사유 : 현장여건 반영에 따른 물량 변경

아. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경생태 테마공원 육성

산하공원운영, 선유도공원 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 변경설계서 1부 및 변경도면 1부.
3. 제비율확인서 1부. 끝.

주무관	한미진		원장	고봉채		여의도공원관리사무소장	나옥임		서부공원녹지사업소장	04/22 남길순
협조자	재무팀장	정동철
시행	여의도공원관리사무소-999	(		)	접수		(		)
우		여의동로 330	/
전화		/전송	02-786-2599	/		/	대시민공개