투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(주차계획과장)
(경유)
제목	신림공영차고지 건설공사 기본 및 실시설계용역 과업기간 연장 요청 알림

1. 유신 구조-19-1868호(2019. 04. 19.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『신림 공영차고지(저류조포함) 건설공사 기본 및 실시설계』와 관련 설계수행 용역자로부터 과업기간 연장 요청이 있어 알려드리오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가.용역개요

1) 용 역 명 : 신림 공영차고지(저류조포함) 건설공사 기본 및 실시설계

2) 위    치 : 서울특별시 관악구 신림동 140-2번지 일대

3) 용역규모

가) 주차장 : 버스 101대 (지상, 지하1층), 관리동 및 부속시설

나) 저류조 : 빗물저류조 1개소 (V=35,000㎥, 지하2층)

4) 용역기간 : 2016. 12. 1. ~ 2019. 04. 30.

5) 도 급 액 : ************

6) 계 약 자 : *******************************

나. 용역기간 연장요구(용역사)

1) 준공기한 연장 : 2개월

- 당초: '16. 12. 1.~'19. 0 4 . 30. ⇒ 변경: '16. 12. 1.~'19. 0 6 . 2 8 .

2) 연장사유 :************************************                 ***************************************

*************************************

***************

붙임 : 과업기간 연장 요청 공문  1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	차승환		토목설계과장	김동현		토목부장	04/22 김영수
협조자
시행	토목부-6910	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	chsh155@seoul.go.kr	/	부분공개(5)