문서번호	설비부-5848
결재일자	2019.4.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
손영일	임병국	04/23 임정규

『동부간선도로 확장 3공구 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2019. 4.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『동부간선도로 확장 3공구 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

『동부간선도로 확장 3공구 전기공사』관급자재와 관련, 현장여건상 납품 시기가 미도래하여 다음과 같이 연기하고자 보고 드림

관련근거

❍ 관급자재 납품기한 연기요청(동부간선도로 확장 3공구 전기공사)

[동삼감 제2019-55호]

공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장 3공구 전기공사

❍ 공사위치 : 상계주공16단지~의정부 시계, 2,250m

❍ 공사규모 : 도로확장(4차로→6차로), 연장 1,980m

지하차도 2개소(상도 190m, 장암 400m)

❍ 공사기간 : 총차 ‘08.06.26.~‘20.12.31. / 8차 ‘18.12.10.~’19.06.30.

❍ 도 급 비 : 총차 3,915,532천원 / 8차 300,000천원

❍ 감 리 단 : 동부엔지니어링㈜

❍ 시 공 사 : ㈜정등전력

검토내용

❍ 납품기한 연기 사유 : 공사여건 및 공정상 납품기한 미도래

❍ 납품기한 연기 내용

납품요구번호	품 명	규격	계약자	계약금액 (원)	납 품 기 한		비고
					당 초	변 경
12-19-1-29621-00	LED터널등기구	75W	㈜신일라이팅	274,824,900	‘19.05.01.	‘19.12.31.
12-18-2-41135-00	배전반	4면	㈜디투엔지니어링	139,118,000	‘19.05.12.	‘19.12.31.
12-19-2-14303-00	배전반	3면	㈜디투엔지니어링	101,699,000	‘19.05.19.	‘19.12.31.
12182151600	자동제어 장치	1식	㈜싸이몬	328,000,000	‘19.06.30.	‘19.12.31.

❍ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

책임건설사업관리기술자 검토의견

❍ 선행 토목공정(방음터널 및 수락고가차도교 설치)와 연계하여 전기공사를 시행함으로 전기공사에 사용하는 관급자재 납품기한을 토목공정 계획에  따라 연기하여 원활한 공사진행에 만전을 기하고자 함.

조치계획

❍ 감리단의 관급자재 납품연기 사유가 적정하다고 판단되므로, 총무부에 LED터널등기구 외 3건의 관급자재 납품기한을 ‘19.12.31.까지 연기 조치

붙 임 : 관급자재 납품기한 연장 관련 문서 1부.  끝.