문서번호	설비부-5894
결재일자	2019.4.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
곽진곤		임병국	04/23 임정규
협조

「중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사」 설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

「중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사」

설계변경(정산) 검토 보고

우리본부에서 시행중인「중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사」관련, 현장여건에 따른 물량 조정 및 보험료 정산 사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 보고드림.

1		현 황

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사

○ 위    치 : 노원구 월계동 230 일대(월계역~학여울청구 아파트)

○ 규    모 : 보행교량 설치 폭 4.5m, 연장 251m, 닐센아치교

○ 도 급 액 : 총차 363,310,000원(2차 213,310,000원)

○ 공사기간 : ‘17. 3. 24. ~ ’19. 4. 30.(총차)

‘18. 1. 24.  ~ ’19. 4. 30.(2차)

○ 시 공 사 : ㈜화성이엔에프 대표 김선화

○ 감 리 단 : ㈜대한콘설탄트 외 1개사

2		관 련 근 거

□ 감리단 실정보고

○ ㈜대한(감본) 제 19 -59호

- 「중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사(전체3회, 2차2회) 설계변경 승인 요청 」

３		설계변경 검토

□ 주요 설계변경 내용

○ 동부간선도로 확장공사(1공구) 측의 지장물 이설요청

- 분전반 3면, 가로등 1본 이설(기 실정보고 및 승인, ‘19. 4. 11.)

○ 월계역 공영주차장 가각정리에 따른 향후 유지관리부서(서울시설공단) 측의 기전시설물 설치 요청

- 가로등 6본, 투광등2개소 설치(기 실정보고 및 승인, ‘19. 4. 11.)

○ 산재, 고용보험료 1차 계약분 준공시 미정산금 반영 및 산업안전보건관리비 정산

□ 주요공종 증감내역

공 종	단위	당 초	변 경	증‧감
DUCT COVER 재사용철거후 설치	m	0	143	증) 143
광케이블 접속(1코어)	m	0	48	증) 48
전선관 설치(FEP Ø30)	m	90	487	증) 397
가로등 기초 설치(500*800*800)	m	0	6	증) 6

□ 설계변경(정산) 금액                              (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증‧감	비고
1차	150,000,000	150,000,000	-	기 준공
2차	213,310,000	249,814,000	증) 36,504,000	정산
총차	363,310,000	399,814,000	증) 36,504,000	정산

４		보고자 의견

○ 상기와 같이 현장여건에 따른 물량 조정 및 각종 보험료와 안전관리 정산내역을 설계변경(정산) 처리하고 총무부에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경(정산) 내역서(2차) 1부.

2. 계약금액 검증확인서 1부.  끝.