문서번호	박물관과-4283
결재일자	2019.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	박물관정책팀장	박물관과장
손동민	김수현	04/23 최원규

『삼청각 운영계획 및 리모델링 방안 수립 컨설팅 용역』

계약기간 연장 계획

2019. 4.

문화본부

(박물관과)

『삼청각 운영계획 및 리모델링 방안 수립 컨설팅 용역』

계약기간 연장 계획

유관 용역과의 과업 연계 촉진 및 일정 편의를 위하여  ‘삼청각 운영계획 및 리모델링 방안 수립 컨설팅 용역’ 계약 기간을 연장하고자 함

□ 연장사유

❍ 유관 용역과의 연계성 강화를 통한 삼청각 활성화 사업의 효율적 추진

- ‘삼청각 운영계획 및 리모델링 방안 수립 컨설팅 용역(‘18.11~‘19.4)’과  ‘삼청각 한식문화관 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역(‘19.3~‘19.8)’은 삼청각 활성화 증진을 위한 공동 목적 아래 추진되고 있으며,

- 실제 삼청각 기본운영 방향, 공간 및 프로그램 구성 등 세부과업이 한식문화관 건립과도 긴밀하게 연관되어 용역 간 과업 진행 상황 공유 및 교차 점검을 위한 상호 집중 협의 기간 필요

❍ 최종보고회 개최 시기와 임시회 회기 중복으로 인한 일정 편성 곤란

- 당초 4월말로 예정된 용역 최종보고회 시기와 286회 임시회 회기가 중복되어 정상적인 과업완료를 위한 용역기간 연장 불가피

□ 연장개요

❍ 용 역 명 : 삼청각 운영계획 및 리모델링 방안 수립 컨설팅 용역

❍ 계약금액 : 48,500천원

❍ 용역업체 : ㈜메타기획컨설팅 (대표 : 이승훈, 서울 성북구 성북로 122)

❍ 연장기간 : 1개월 연장

- (당초) ’18. 11. 30. ~ ’19. 4. 30. ⇒ (변경) ’18. 11. 30. ~ ’19. 5. 31.

※ 서울시 귀책사유에 따른 연장 건으로 지체상금 미부과

□ 향후계획

❍ ’19. 4월말 : 재무과 계약변경(기간연장) 의뢰

❍ ’19. 5월말 : 최종보고회 개최 및 용역 완료(성과품 납품).  끝.