“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역계약 변경(준공기한 연기) 의뢰

1. 동북권사업단-3839호(2019. 4.22.)와 관련입니다.

2. 「동부간선도로(창동․상계구간) 지하차도 설치공사 타당성조사용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기에 따른 계약변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 동부간선도로(창동․상계구간) 지하차도 설치공사 타당성조사용역

2) 용역기간 : 2018.11.23. ~ 2019. 4.24.

3) 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 대표 임종선

4) 계약금액 : 88,838천원

나. 변경내용

1) 준공기한 연기 (※ 그 외 변경 없음.)

- 당초 : 2018.11.23. ~ 2019. 4.24.

- 변경 : 2018.11.23. ~ 2019. 5.24.

2) 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1) 준공기한 연기의뢰서 1부

2) 과업내용서(변경) 1부.

3) 합의서 1부.

4) 용역기간 연장 방침 1부.  끝.

	동북권사업과장
주무관	강대양		발전기획팀장	오대중		동북권사업과장	04/23 오장환
협조자
시행	동북권사업과-3959	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 5층	/
전화	2133-8284	/전송	2133-0740	/		/	부분공개(5)