문서번호	조경과-2672
결재일자	2019.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		조경과장
이영선	강금완		04/24 강인호
협 조

「AZA대비 수목 식재 및 휴게시설 설치공사」

실정사항 검토보고

2018. 4.

조 경 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「AZA대비 수목식재 및 휴게시설 설치공사」실정사항 검토보고

「AZA대비 수목식재 및 휴게시설 설치공사」추진과 관련 실정사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 조치하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : AZA대비 수목식재 및 휴게시설 설치공사

○ 공사기간 : 2019. 4. 1 ~ 5. 10

○ 공사금액 ***************

********************************

○ 도 급 자 : ***************

○ 하도급자 :******************

□ 실정사항 검토

○ 검토사유

- 방사장 현장여건 및 동물원 요구사항, 원장 지시사항 등을 반영

○ 현황 및 검토내용

구분	현 황	검 토 내 용	비 고
해양관, 야행관	◦면적 대비 그늘막 설치면적이 제한되어 햇빛에 노출되는 부분이 있어 추가 설치 요청 (동물복지1과-1650, 2019.04.05.)	◦그늘막 제품 변경 : 11면 → 22면 추가 설치
제1아프리카관	◦청단풍 식재지 기존 수목이 활착하고 있어 식재공간 부족 ◦홍학사 시설물 주변 차폐식재 요청	◦청단풍 20주 제외 ◦측백나무 10주 추가
대동물관	◦흰코뿔소 방사장 좌측 화단이 비어있어 당초 아메리카 들소 식재예정인 느티나무 4주 위치 변경 요청 (동물복지2과-1496, 2019.03.29.) ◦뽕나무 식재예정지 코끼리 사체 매립지로식재불가	◦느티나무 4주 위치 변경 ◦조경석 쌓기(40㎡) 추가 ◦뽕나무 식재 위치변경 (대동물관 → 양묘장)
낙타사	◦산양방사장 수목식재시 동물활동공간 축소	◦느티나무 1주 제외
유인원관	◦맨드릴원숭이 방사장 포장면으로 인해 식재불가	◦청단풍 2주 제외
사슴사	◦에조사슴, 물사슴 방사장 수목식재시 동물활동 공간 축소	◦느티나무 4주 제외
데크쉼터	◦녹지대쪽 조경석으로 인해 식재공간 협소	◦느티나무 1주 위치변경 (데크쉼터→ 관람로 (대동물관 앞))
야 구 장	◦층계화단 하부 휴게장소 그늘목 필요 (원장지시사항, 2019.04.09)	◦느티나무 5주 추가	신규
코끼리 열차길 주변	◦코끼리 열차길 주변 화단 추가 식재요청 (운영과-2091, 2019.04.16.)	◦화살나무 200주 추가	신규
관람로	◦식재대상지 1개소 「랫서팬더 방사장 조성공사」에 포함됨 (현재 띠녹지로 조성됨)	◦느티나무 1주 위치변경 (랫서팬더사 → 수달사 건너) ◦가로수 보호판 1조 제외
공 통	◦방사장내 식재수목 동물접근으로 피해 우려	◦지주목 길이변경으로 수목보호 공간확보(L1800→L2100)
	◦방사장 토양이 동물분뇨로 인해 오염되어 고사 우려	◦환토 물량 추가

추가설치
해양관(노출면 발생)	제1아프리카관(기존수목 활착)
대동물관(흰코뿔소 방사장 좌측 화단)	데크쉼터(식재공간 부족)
야구장 층계형 화단 하부(그늘목 필요)	코끼리열차길 주변 화단(식재보강 요청)

- 현황사진

□ 처리계획

○ 위와 같이 공사여건이 변경되었기에 검토내용을 우선 시공토록 조치하고 추후 설계변경(관급자재 변경포함 - 수목보호판감)처리하고자 함.

끝.