문서번호	정수시설과-3338
결재일자	2019.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이승우	유영춘	04/24 가길현

‘20년 태양광발전시설 설치계획 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.04

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

‘20년 태양광발전시설 설치계획 변경보고

온실가스 배출량 감축 및 에너지절감을 위해 2020년 설치 예정인 1정수장

침전지 및 1활성탄흡착지 태양광발전시설 설치계획을 변경 보고 함

Ⅰ				추진근거

□ 생산관리과-11092(2018.10.5.)호 관련

❍ 월드컵대교 건설관련 자문회의 결과 보고

❍ 회의일자 : 2018.9.14.(화)

❍ 회의결과 : 침전지 8개지에 대해 모두 건물로 건설하여 실내화 추진 필요함

□ 생산관리과-3421(20196.4.2)호 관련

❍ 영등포1정수장 침전지보호시설 설치형식 검토 회의결과(덮개설치)

Ⅱ				설치계획변경

□ 당 초 : ‘20년 국비지원사업으로 태양광발전시설 설치

❍ 설치현황

설치위치	설치용량	설치금액	설치년도
1정수장 침전지	500kW	1,437백만원	2020년
1활성탄흡착지	15kW	43백만원	2020년

□ 변 경 : ‘20년 태양광발전시설 설치 취소

❍ 월드컵대교 건설에 따른 1정수장 침전지 상부 구조물 설치

- SMC 프라스틱 패널로 화재발생시 수돗물 생산 중단 우려

- 지지대등 중량물의 태양광발전시설 설치 불가

❍ 아치형 라멘 구조로 점검중 안전사고 발생 및 유지관리 어려움

- 재질이 미끄러운 재질로 동절기 결빙에 의한 전도, 추락사고등

❍ 침전지 1지, 2지상부에 교량설치로 그늘이 발생하여 태양광발전 불량

Ⅲ				향후계획

□ 월드컵대교 준공 후 대체부지 재검토

❍ 1정수장 침전지 설치 불가로 설치용량 대폭 축소 및 미설치