투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	계약변경(정산) 의뢰(중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사)

우리 본부에서 추진 중인 『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사』와 관련 하여 계약변경(정산) 사항이 있어 아래와 같이 계약변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사

나. 계 약 자 : ㈜화성이엔에프 대표 김선화

다. 공사기간 : 2017.3.24. ~ 2019.4.30. (총차)

2018.1.24. ~ 2019.4.30. (2차)

라. 변경사항(계약금액)                                           (단위:원)

구 분	계약금액				비 고
	차수	당 초	변 경	증 · 감
전 기 공 사	2차	213,310,000	249,814,000	증) 36,504,000
	총차	363,310,000	399,814,000	증) 36,504,000

마. 계약변경 사유 : 기 실정보고 승인건, 현장여건에 따른 물량조정 및 제경비 정산

바. 예산과목 : 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 중랑천 초안산앞 보행교량설치, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경(정산) 검토 보고 1부.

2. 정산서류[설계변경내역서 및 합의각서, 제비율 검증 포함] 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	곽진곤		시책사업과장	임병국		설비부장	04/24 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-5969	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5 6)