문서번호	토목부-7193
결재일자	2019.4.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도시고속도로과장	토목부장
서민석		代박운용	전결 04/25 김영수
협조
	주무관		박운용

박미지하차도 및 시흥UD 시공물량 정산보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

2019. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

-강남순환도시고속도로(4공구)-

박미지하차도 및 시흥UD 시공물량 정산보고

금천구 시흥3동 남북간연결도로 “박미지하차도” 및 시흥대로~강남순환로 연결램프인 “시흥Up·Down-Ramp구간”의 시공물량 정산보고임.

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  도 급 비 : 1,984억 원

❍  공사기간 : □01. 12. 29. ～□19. 11.30.(민자구간 개통 □16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜/㈜서영엔지니어링

추진경위

❍ '16.07.03. : 강남순환로 1단계구간 개통(시흥UD-Ramp 임시 개통)

❍ '18.03.02. : 시흥3동 남북간연결도로(박미지하차도) 개통

❍ '18.11.10. : 박미지하차도 및 시흥Up·Down-Ramp 공사 완료

❍ '18.04.17. : 호암대교 하부 체육시설(족구장) 인수인계 완료

❍ '19.04.24. : 건설사업관리단 시공물량 정산보고

건설사업관리단 검토의견

❍ 금천구 시흥3동 남북간지역 연결도로 “박미지하차도” 및 시흥대로~강남순환로 연결램프인 시흥UD-Ramp 주변 공사중 변경된 시공물량에 대하여 정산하는 사항으로 도급사의 산출수량 및 공사금액은 적정한 것으로 검토됨.

❍ 주요 변경사항은 시설물을 인수하여 유지관리할 금천구청 유관부서 요구사항(호암대교 하부공간에 체육시설-족구장 설치, 표지판, 가드레일, 배수시설 추가설치 등) 및 현장여건 반영임.

❍ 주요수량 증·감 현황

공 종	단위	당초	변경	증.감	비 고
가설방음벽(지주H=3.5m, W=2.0M)	m	372	205	-167	주민 이주로 불필요
지반조사 및 시험	회	2	0	-2	기존자료 활용
그루빙, 횡절단(9x4x50)	m	599	714	115	Down Ramp 임시 우회도로 설치
표지판	ea	6	0	-6	금천구 요구(도로교통과)
투명방음벽(H=2.0~4.0m, W=4.0M)	m	79	95	16	5공구 접속부 물량정산
종배수관접합및부설	m	113	379	266	금천구 요구사항(치수과)
측구(L형측구, U형측구)	m	818	495	-323	금천구 요구사항 (치수과)
집수정/흙깍기부(D=1000mm)	ea	4	14	10	금천구 요구사항(치수과)
조립식플륨관(300x300, 400X400)	m	0	60	60	금천구 요구사항(문화체육과)
인조잔디포장(T155mm)	㎡	859	621	-238	금천구 요구사항(문화체육과)
그물망휀스(H5.0xW4.0)	경간	0	29	29	금천구 요구사항(문화체육과)
족구네트(지주포함)	set	0	1	1	금천구 요구사항(문화체육과)

❍ 공사비 증․감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
경 비	1,067,475	1,080,080	12,605
부가세	303,625	313,120	9,495
공사비	1,371,100	1,393,200	22,100

검토의견

❍ 금천구 시흥3동 박미지하차도, 시흥UD-Ramp 주변구간의 시공물량을 정산코자하는 건설사업관리단의 실정보고는 적정하므로 승인하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.