문서번호	도로보수과-3750
결재일자	2019.4.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최완		이상희	04/25 신응수
협조
	주무관		최병수

2019년 서울형 친환경 도로포장 추진 계획

2019. 4.

북부도로사업소

[도로보수과]

2019년 서울형 친환경 도로포장공사 추진계획

최근 미세먼지 증가, 교통소음, 폭염 장기화  등 기후·환경변화에 대응할수 있는 미래지향적 친환경포장 예산이 배정됨에 따라 대상 사업구간을 선정 도로포장사업을 추진하기 위한 보고사항 임.

관련 근거

○ 도로관리과–3789호(2019.3.6.) : 서울형 친환경 도로포장 종합 추진계획

○ 도로관리과–4177호 : 예산 재배정 통보(북부 773백만원)

○ 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로및도로부속물 관리, 노후포장

도로 정비(도시개발특별회계), 시설비및부대비, 시설비

2019년 친환경 포장예산 재배정 현황

총 계	재배정액	친환경 포장명	비 고
773백만원	333백만원	중온 포장	미세먼지 저감 포장
	300백만원	배수성·저소음 포장	도로소음 저감 포장
	140백만원	고강성·배수성 포장	이용환경 개선 포장

※ 6개 사업소별 중온포장, 배수성·저소음포장 예산액은 동일 함

※ 고강성·배수성 포장은 북부도로사업소 선별적 시행

사업대상 노선구간 선정

○ 고강성·배수성 포장은 아스콘 절삭(t=5cm)이 사전에 선행된 구간으로

2019년도 노후포장도로 정비공사장내 소성변형이 심한 구간을 선정 시행

○ 포장도로 노후화로 배수성저소음 포장은 주거밀집 지역내 소음저감과

중온포장은 도로균열 및 소성변형이 심한 노선을 선정(SPI지수 6이하)시행

사업대상 현황

친환경 포장명	위 치	규 모	개략공사비 (백만원)	선 정 사 유	비고
고강도 배수성 포장	노원구 월계로 264 (롯데캐슬루나아파트 버스정류장 주변) 도봉구 도봉로 693 (방학남부역 정류장) 도봉로 방학사거리 (방학사거리 교차로)	버스정류장 3개소 12a 버스,일반 1개소 8a (t=5cm)	140	버스전용도로상 버스정류장 주변과 버스차로 및 일반도로상에 소성변형이 심한 구간을 선정 고강도 포장 시행으로 모니터 점검 (SPI지수 : 4.93)	1구역
중온 포장	방학로 (문화고교 교차로 ~ 상계교)	B=20~22m L=420m A=88a (t=5cm)	333	서울문화고교 교차로에서 상계교간 도로노후로 균열과 소성변형이 발생한 구간을 중온포장으로 시행 (SPI지수 : 5.50)	2구역
배수성 저소음 포장	한글비석로 (상계역 교차로 ~ 삿갓봉 근린공원 교차로)	B=15m L=320m A=48a (t=10cm)	300	삼창, 동도, 대호, 한화, 신일아파트 등 주거지역에 저소음포장으로 소음저감 (SPI지수 : 4.34)	2구역
계			733

추진계획

○ 2019. 4 ~ 5 : 아스콘자재 납품회사에 견적서 제출 의뢰

○ 2019. 5 ~ 6 : 아스콘자재 서울시 계약심사과 의뢰 및 재무과 입찰

○ 2019. 6 ~ 10 : 사업시행 및 준공

조치의견

○ 2019년 노후포장도로정비공사(1,2구역)에 포함하여 선시공 시행하고 추후 설계변경에 반영하여 정산처리 하고자 함 .

행정사항

○ 해당 관련기관 공사알림 및 관할경찰서에 교통협조 요청

붙임  1) 관련공문 1부.

2) 정비대상 위치도 1부.    끝.