문서번호	도로보수과-2789
결재일자	2019.4.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
이석연		代박해웅	04/25 김유찬
협조
	주무관		김형준

신사역 주변 도로연석 철거 계획

2019. 4.

동부도로사업소

(도로보수과)

신사역 주변 도로연석 철거 계획

신사역 주변 무단횡단 금지휀스 설치와 관련하여 설치 예정구간 도로연석이 철제로 되어 있어 무단횡단 금지휀스 설치가 어려워 도로연석 철거 계획을 검토하여 보고드림

1		근 거

무단횡단 금지시설 설치 구간 및 예산 재배정 알림【교통운영과-4336(2019.3.15.)호】

2019년 무단횡단 금지시설 설치사업 추진 계획【도로보수과-1694(2019.3.19.)호】

무단횡단 방지펜스 설치 요청【강남경찰서 교통과-5038(2019.4.25.)호】

2		현황 및 문제점

위    치: 도산대로 신사역교차로 주변 외 1개소

도로연석 설치현황: 2개소(0.25m×65m, 0.25m×25m)

문 제 점

- 도산대로 신사역 교차로 앞 및 국님연금 강남사옥 앞 무단횡단 금지휀스 설치 구간에 노후된 철제연석이 있어 무단횡단금지휀스 설치에 어려움(부착성결여 및 탈락우려)이 있음(도산대로 128 국민연금 강남사옥 앞은  강남경찰서에서 추가 설치 요청 구간임)

- 무단횡단 금지휀스 납품기한이 2019. 4. 20.이지만 상기 사유에 의해 납품이 지연됨

3		정비개요

정비규모: 폭 0.5m, 연장 90m, 재포장 면적 0.45a

정비내용: 도로연석 철거 및 재포장 후 무단횡단 금지휀스 설치

**********(도로관리과, 노후포장도로 정비공사, 시설비)

4		추진계획

상기사항에 대하여 우리사업소와 계약된 단가게약업체를 활용 우선 작업지시 시공하고 추후 설계변경 및 정산처리코자 함.

- 구조물철거/재포장 : 2019년 포장도로 긴급복구 정비공사(연간단가)

- 발생폐기물처리 : 2019년 관내 불량맨홀정비공사 건설폐기물 처리용역

5		행정사항

무단횡단 금지휀스 수량 및 납품기한 연기

- 수량: 당초: 171경간 → 변경: 184경간

- 납기: 당초: 2019. 4. 20. → 변경: 2019. 5. 31.

지연배상금 면제

- 면제사유: 발주기관의 책임으로 시공 지연

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.