＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 금액 변경시행(2018년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사,제2회-최종)

우리사업소에서 시행하고 있는『2018년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회-최종) 및 차수별 금액 변경을 시행하고자 합니다.

가. 공  사  명: 2018년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사

나. 계  약  자: ************

다. 계약기간: 2018.5.8 ~ 2019.5.30.

라. 설계변경 사유: 시공물량 증·감 발생

마. 설계변경 금액 내역                                                 (단위:원)

구 분		총부기 금액	1차수 금액	2차수 금액	비 고
계약금액	당초	*************	*************	***********
	변경	*************	*************	***********
	(증.감)	**************	**	*****************

바. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급배수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(긴급누수복구)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(송배수관정비)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(배급수관정비)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브정비)

붙 임 1) 변경 내역서 1부.

2) 설계변경 관련 문서 각 1부.

주무관	황대룡		급수설비팀장	이상환		급수운영과장	송근호		동부수도사업소장	04/26 이구석
협조자
시행	급수운영과-9776	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2758	/전송	3146-2789	/	daeryong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)