문서번호	급수운영과-9747
결재일자	2019.4.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
황대룡	이상환	송근호		04/26 이구석
협 조

2017년 동수도사업소 관내 포장복구공사(장기계속단가계약)

설계  변경 시행 보고(제3회-최종)

2018. 6.

2018년 동수도사업소 관내 포장복구공사(장기계속단가계약)

설계 변경 시행 보고( 제2회-최종 )

	우리 사업소에서 시행하고 있는 「2018년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)」에 대한 시공 물량 증감에 따른 계약 금액 조정을 본부 안전총괄과로부터 검토받고 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행코자 합니다. ※ 계약 금액 조정 검토 결과 통보(안전총괄과-4461호, 2019.4.26)

공사현황

○ 공 사 명: 2018년 광진구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 도 급 자: *****************

○ 공사기간: 2018. 5. 10.~2019. 5.31

○ 도급금액: **************

○ 공사개요: 아스팔트포장 – 95a, 콘크리트포장-6a 등

설계 변경 내용

○ 설계 변경 사유

- 토공, 포장공, 차선도색공 등 시공물량 증·감 에 따른 변경

- 건강, 연금, 노인장기 요양보험료 정산에 따른 변경 등

○ 시공 수량 변경

- 시공물량 증·감 현황: 196개 공종

· 물량증가(37개 공종): 기계터파기(굴삭기타이어0.18㎥) 외 36개 공종

· 물량감소(159개 공종): 아트팔트 포장깨기(100~150mm적용) 외 158개 공종

- 사급자재 물량 변동: 30개 종

· 물량증가(3개 종): 보조기층재(75mm이하)  외 2개 종

· 물량감소(27개 종): 시멘트(40㎏-1종))  외 26개 종

계약 금액 조정 결과

○ 계약 금액 조정심사 요청 및 결과

(단위: 천원)

구 분	심사요청			심사결과(본부)
	당 초	변 경	증·감	심사대상	검토	증 감
도급비	*********	*********	*********	*******	*******	*****

○ 계약 금액 변경 내역

(단위: 원)

구 분	금액 변경			비 고
	당 초	변 경	증·감
도 급 비	*************	*************	*************	******
공 급 가 액	*************	*************	*************
부가가치세	************	*************	**************

조치 의견

○ 「2018년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)」 에 대한 설계 변경을 본부 계약금액 조정 검토 결과 대로 시행하여 변경 계약 및 공사 준공에 만전을 기하고자 합니다.

첨부  1) 계약 금액(설계 변경)조정 결과 통보 각1부.

2) 변경 설계 내역서 1부.  끝.