	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서울002호기 3000시간 및 10년검사 외주정비 계약변경 계획보고

1. 관련근거

가. 소방항공대-1195(2019.4.17.)호「서울002호기 외주정비 중 결함발생 및 추가작업 보고」

나. 행정지원과-2957(2019.2.28.)호「서울002호 헬기 3,000시간 및 10년 검사 외주정비 계약 체결 알림」

다. 소방항공대-169(2019.1.18.)호「서울002호 헬기 3,000시간 및 10년 외주정비 추진 계획 보고」

2. 위와 관련하여 우리구조단 소방항공대에서 운영중인 서울002호기(AS365N2)의 외주정비 수행 중 발견된 결함등 추가작업 수행을 위하여 계약을 변경하고자 보고합니다.

가. 추가작업 내용

순번	추가 작업내용	주요 소요자재			비고
		부품번호	부품명칭	수량
1	긴급기술회보 ASB 53.00.62 Modification of the MGB fixed cowling attachment (주기어박스 고정덥개 접합부 개조작업)	365A24-1133-00	Front Braket	1EA	자재 (사급지원)
		22125BC050024L	Screw	5EA
		23116AG050LE	Washer	5EA
2	긴급기술회보 ASB 63.00.19 Tail Rotor Drive flange - Installtionof AFT output stop (꼬리날개 구동축 연결부 뒤쪽 멈춤부위 - 장착)	365A32-7836-20	Stop, Output, AFT	2EA
		23310CA020025	Pin, split	6EA
		ASNA0045BC100L	Nut, Hex Castellated	6EA
3	트랜스폰더 수신불량, 해외정비 수리 (항공기 위치식별장치 수신불량)	066-1071-00	Transponder	1EA	점검수리
4	Frequency Adapter 작동불량 (주회전익 진동흡수장치 작동불량)	704A33640099 (365A31-2038-01)	Frequency Adapter	2EA	자재 (관급지원)
5	Pitot Tube 균열 (항공기 동압 수감부 균열)	704A47140004	Pitot Tube	2EA
6	예비엔진 교체장착 (2019.8.30. 보관 유효기한 만료)	0292005240 (Arriel iC2)	Engine Assy	1EA	소모자재 사급지원

3. 추가작업에 따른 계약 변경내용

가. 변경금액 : 금183,026,000원(금일억팔천삼백이만육천원)

변 경 전	금162,204,000원
변 경 후	금183,026,000원
증·감액	금 20,822,000원

변 경 전	2019. 2. 28. ~ 7. 5.
변 경 후	2019. 2. 28. ~ 7. 15.

나. 변경기간

붙  임  1. 소요자재 목록 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 발견된 결함내용 및 사진 1부. 끝.

담당자	정기수		정비반장	권순철		1팀장	신용선		소방항공대장	박양수
119특수구조단장	04/25 이창식
협조자	담당자	박기현		행정지원과장	김장군
시행	소방항공대-1274	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84 서울소방항공대	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)