투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	시설공사 설계변경 계약 의뢰(초안산 보행교량-전체 8회, 3차 4회)

우리본부에서 시행중인 『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사』에 대해여 아래와 같이 설계변경(전체 8회, 3차 4회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

나. 도 급 비 : ***************************

다. 공사기간 : ‘16.04.29.∼’19.04.30.(3차: ‘18.01.22.~‘19.04.30.)

라. 도 급 자 : *******

마. 예산과목

- 일반회계, 치수 및 하천관리, 하천 복원 및 정비, 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경(전체 8회, 3차 4회)

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증. △감
전체 (8회)	도 급 액	*********	*********	*********
	공사기간	************ ***********	***********************	*
3차 (4회)	도 급 액	*********	*********	*********
	공사기간	************ ***********	************ ***********	*

사. 설계변경 사유

- 월계역 공영주차장 가각부 정비에 따른 옹벽 철거 및 재설치 등

- 노원구청 요청에 따른 교량점검시설 설치 반영 등

- 민원 및 노원구청 요청에 따른 계단부 캐노피 설치 반영 등

- 공영주차장 복구(포장) 및 개선공사 등

- 원가 제비율 정산 등

붙임 : 1. 설계변경 방침서 및 감리단 검토의견서 각 1부.

2. 변경 내역서(전체 8회, 3차 4회) 등 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	권해엽		교량건설과장	장종환		토목부장	04/25 김영수
협조자	주무관	노순재		주무관	황윤기
시행	토목부-7195	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)