문서번호	인력개발과-9553
결재일자	2019.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		인재노무팀장	인력개발과장
전성민		권소현	04/25 김기봉
협조

- 서천연수원 외부목재데크 개선공사 -

관급자재(목재데크) 납품기한 연기 검토보고

2019. 4.

행   정   국

(인력개발과)

- 서천연수원 외부목재데크 개선공사 -

관급자재(목재데크) 납품기한 연기 검토보고

‘서천연수원의 외부목재데크 개선공사’ 관급자재의 사용주체인 시공업체가 적격심사 지연(1~2순위 업체 탈락)으로 4월말경 선정될 것으로 예상되어 관급자재 납품기한을 연기(30일)하고자 함

Ⅰ		관급자재 물품계약 현황

□ 계 약 명 : 서천연수원 목재데크 관급자재 구매

□ 납품요구번호 : 12-19-1-29841-00

□ 납품업체 : 주식회사 정목(인천시 서구 소재)

□ 계약내역

물 품 식별번호	품 명	규 격	단위	구 매 내 역			계약기간	인도조건
				수량	단 가	금 액(원)
23368727	목재덱	1,800*120*t30, 말라스	㎡	1,065	53,000	56,445,000	`19.04.02. ~ `19.04.30.	납품장소 차상도
소 계						56,445,000
조달수수료		0.54%	식	1	304,800	304,800
합 계						56,749,800

Ⅱ		추 진 경 위

□ 2019.03.29. : 공사발주 및 관급자재 구매 계획

□ 2019.04.01. : ‘공사계약’ 및 ‘관급자재 구매’ 의뢰

□ 2019.04.02. : 관급자재 물품계약

□ 2019.04.02. : 공사 입찰공고

□ 2019.04.10. : 공사 개찰(114개 업체 참여)

□ 2019.04.11.~현재 : 적격심사 진행중

※ 1~2순위 업체 적격심사 탈락, 3순위 업체 적격심사 진행중

Ⅲ		납품기한 연기내용

□ 관련근거

○ 적격심사 부적격 통보(재무과-22283호 및 22284호, `19.4.23.)

- ‘개찰 1순위 및 2순위 업체’ 적격심사 결과 부적격(탈락)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제15장 ‘물품계약 일반조건’ 제7절 제2호(계약기간의 연장)

□ 납품기한 연기내용

○ 연장사유 : 공사입찰 지연으로 관급자재 반입시기 미도래

- 공사입찰 지연(적격심사 중 1~2순위 업체 탈락)으로 시공업체 선정 지연 중

- 시공업체 선정 후 관급자재(목재덱)의 반입시기 및 크기검토(현장 실측길이 반영) 등 협의기간 필요

○ 연기내용 : 증30일

구 분	당 초	변 경	비 고
납품기한	`19.04.02. ~ `19.04.30.	`19.04.02. ~ `19.05.30.	증30일

□ 검토의견

○ ‘발주청의 사정으로 납품이 지연되는 경우’로 시공업체 선정후 관급자재(목재덱)의 수급시기 등을 조정하기 위해 납품기한을 연장하는 것이 타당함

○ 귀책사유 : 해당없음

○ 지체상금 부과 : 미부과

Ⅳ		행 정 사 항

□ 물품계약 납품기한 연기 의뢰(⇒재무과)

붙 임  납품업체 합의각서(납품기한 연기) 1부. 끝.