문서번호	건축부-6941
결재일자	2019.4.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	복지시설과장	건축부장
이랑	조영수	04/25 임인구

「50+ 동부캠퍼스 복합시설 건립공사」

설계용역(1차) 계약변경 검토보고

2019. 4.

도시기반시설본부

[건 축 부]

「50+동부캠퍼스 복합시설 건립공사」

설계용역(1차) 계약변경 검토보고

「50+동부캠퍼스 복합시설 건립공사 설계용역」추진관련, 사업의뢰부서의 사업계획 변경에 따른 과업변경으로 계약금액 조정에 대한 검토 보고 드림.

1		용역개요

**************************

************************************************

****************************

**************************

******************************

************

********************************************************************************************************************************************************

2		추진경위

○ ’16.9.30 : 제2동북 50+캠퍼스 복합시설 건립계획(복지정책실)

○ ’17.4.20 : 설계공모 공고 및 당선자 선정·통보(도시공간개선단→건축부)

○ ’17.6.30 : 50+동부캠퍼스 복합시설 건립계획 변경통보(복지정책실→건축부)

○ ’17.9.1  : 설계용역 착수

○ ’17.9.7  : 50+동부캠퍼스 복합시설 건립계획 변경통보(복지정책실→건축부)

○ ’17.10.24 : 변경계약 의뢰(타당성 조사, 도시계획시설변경업무 추가)

○ ’18.4.30 : 50+동부캠퍼스 복합시설 건립계획 변경통보(복지정책실→건축부)

○ ’19.2.27 : 50+동부캠퍼스 복합시설 건립계획 변경통보(복지정책실→건축부)

3		1차 계약변경

관련근거

○ 인생이모작지원과-2339호(2019.2.27.)“50+동부캠퍼스 건립 변경 계획 통보”

○ ㈜신한종합건축사사무소-19-368호(2019.4.24.)“1차수 정산 의견제출”

변경사유

○ 사업의뢰부서의 사업계획 변경으로 인해 잔여과업 이행 불필요

******

********************************************************

************

*******************************************************************************************************

**************************************************

계약변경 내용

****	****		*******		****
	***	***	***	***
****	****************	****	*************	***********	***********
****	****************		**********	**********	***********
****	*****************		***********	****

4		처리의견

○ 사업의뢰부서의 변경 사업계획에 따라 설계용역(1차, 총차)에 대해 계약금액 조정(감 17천원) 후 준공처리 하고자 함.

붙 임 : 관련서류 각 1부.  끝.