문서번호	건축부-7048
결재일자	2019.4.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
양동진		김해룡	04/26 代이형재
협조

『G밸리 근로자 문화복지센터 건립공사』

2차공사 계약시행 검토보고

2019. 04.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『G밸리 근로자 문화복지센터 건립공사』

2차공사 계약시행 검토 보고

우리본부가 시행중인「G밸리 근로자 문화복지센터 건립공사」관련하여 원활한 공사진행을 위하여 2차공사 계약시행을 검토보고 드림

1		공사개요

위    치  : 금천구 가산동 345-58 외 2필지

규    모  : 지하2층, 지상10층, 연면적 6,017㎡

계약기간  : ‘17.11.30. ~ ’20.07.13.(2차 : ‘19.04.27 ~ ‘20.01.31)

도급금액  : 금6,862,040,270원 (2차 : 2,008,435,000원)

시 공 사  : ㈜도량기업 외 2개사

감 리 사  : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소 외 1개사

2		추진경위

2018.02.21.   건설사업관리용역 착수

2018.03.02.   공사 착공

2018.06.29.   계약변경(공사기한 연장)

2019.01.31.   계약변경(공사기한 연장)

2019.04.26.   2차 계약요청

3		2차계약 시행검토

관련근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제11장 입찰유의서 제3절(계약체결) 제1조 마항

- 장기계속-2차 계약요청 검토보고*******************************

계약금액 및 공사기간

구 분	계약금액(원)	공 사 기 간	비 고
***	*************	***********************
***	*************	***********************
***	*************	***********************

주요공종

- 골조, 가설, 창호, 방수 등

예산사항

- 예산과목 : 거점성장 기반 마련, 산업클러스터 조성 및 활성화, G밸리 문화복지센터 조성, 시설비

4		책임건설사업관리기술자 검토의견

상기와 같이「G밸리 근로자 문화복지센터 건립공사(장기계속-2차)」계약 요청서류

를 관계 규정에 의거 검토한 결과 적합하게 작성된 것으로 사료됨.

5		검토의견

책임건설사업관리자의 검토의견에 따라 2차공사를 시행코자 하며, 2차 계약에 대하여 계약부서(총무부)에 의뢰하여 계약 체결하고자 함.

붙 임  : 건설사업관리단 공문 및 2차,총차 내역서, 합의각서 각1부.  끝.