문서번호	광화문광장추진단-4796
결재일자	2019.4.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	광장계획팀장	광화문광장사업반장
주미	이강수	04/27 임창수

「새로운 광화문광장 조성 관련 사전재해영향성 검토 용역」

준공기한 연기(2차) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

도시재생본부

(광화문광장추진단)

「새로운 광화문광장 조성 관련 사전재해영향성 검토 용역」

준공기한 연기(2차) 검토 보고

새로운 광화문광장 조성 계획에 대한 도시계획시설 변경 절차가 당초 예상보다 늦어지고 있어, 본 용역의 준공기한을 연기하고 하고자 함

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 새로운 광화문광장조성 관련 사전재해영향성 검토 용역

○ 용역기간 : ‘18.11.01. ~ ’19.04.29.

○ 계약금액 : 27,145,000원

○ 계 약 자 : (주)태조엔지니어링

○ 과업내용 : 사전재해영향성 검토 계획수립, 검토서 작성 등

□ 추진경위

○ ‘18.09.21.	사전재해영향성 검토용역 추진방침 수립

○ ‘18.10.29.	용역 계약 및 착수

○ ‘18.11.15.	착수 보고

□ 검토내용

○ 준공기한 연기

구분	당초	1차변경	2차변경	비고
용역기간	‘18.11.01.~ ‘19.02.28.	‘18.11.01.~ ’19.04.29. (60일 연장)	‘18.11.01.~ ‘18.10.31. (186일 연장)	- 60일 연장 - 계약금액 변동없음

*********

******************************************************************

******************************************

○ 귀책사유 및 지체상금 부과여부

- 귀책사유 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후계획

○ ‘19. 4. 27. 용역 계약변경 의뢰

○ ‘19. 7월	사전재해영향성 검토 협의(광화문광장추진단 → 하천관리과).  끝.

붙임   1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 연장요청 공문 및 합의각서 1부.  끝.